문서번호	방재시설부-2783
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	02/29 임춘근
협조
	주무관		손병도

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)」

산업대3길 고가 시설한계 변경에 대한 실정보고 검토

2016. 02

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』

산업대3길 고가 시설한계 변경에 대한 실정보고 검토

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)」 산업대3길 고가 시설한계 변경에 대한 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 :  방재시설부-13569(2015.10.12.)호

선진경춘(감)-16–080(2016.02.22)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 노원구 경춘철교 ~ 산업대3길 고가철교

○ 규    모 : 공원조성 연장(L) 1.1km, 면적(A) 53,860㎡

○ 사업기간 : ‘15.10.6 ~ ’16.10.3 (1차수 ‘15.10.6 ~ ’16.8.5)

○ 공 사 비 : 5,445백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 산업대3길 고가 시설한계 변경

- 산업대3길 고가 정비공사와 관련하여 당초 시설한계높이 4.2m 적용하여      설계되어 있으나 향후 행복주택 건설 및 주변 개발에 따른 대형차량(소방차,     대형버스)의 원활한 소통과 대중교통노선 변경 등에 유연하게 대응할 수      있도록 시설한계높이 4.5m로 변경

당초 : 시설한계 높이 4.2m	변경 : 시설한계 높이 4.5m

○ 관급자재 수량변경 검토

자 재 명	규 격	단위	당초수량	변경수량	증 · 감	비 고
레미콘	25-27-15	㎥	62	67	증) 5

○ 수량 및 공사비 검토                                       (단위 : 천원)

구분	공종	단위	당초		변경		증·감		비고
			수량	공사비	수량	공사비	수량	공사비
10. 교량공
	콘크리트타설		57	718	62	781	증)5	증)63
	합판거푸집		111	2,580	140	3,251	증)9	증)671
	강관동바리		6	181	7	212	증)1	증)31
	강관비계		89	1,245	99	1,385	증)10	증)140
	스페이서 설치		108	38	137	48	증)29	증)10
	그라인딩		380	944	392	973	증)12	증)29
	고압물청소		380	369	392	380	증)12	증)11
	콘크리트 도장		380	14,527	392	14,985	증)12	증)458
	철근가공 조립		10.085	6,120	11.136	6,758	증)1,051	증)638
	기 타		1	20,764	1	20,764	-	-
	소 계			47,486	-	49,537	-	증)2,051
부 대 공
	철근운반		3.405	32	14,476	137	증)11.071	증)105
	고재대		0.099	-19	0.099	-19	-	-
	가림막 휀스		-		542	10,901	증)542	증)10,901
	소 계			13		11,019		증)11,006
사급자재대
	고장력 철근(H13)	ton	3.703	1,660	3.752	1,682	증)0.049	증)22
	고장력 철근(H16)	ton	2.635	1,171	2.785	1,237	증)0.150	증)67
	고장력 철근(H19)	ton	1.449	644	1.708	759	증)0.259	증)115
	고장력 철근(H22)	ton	4.047	1,798	4.349	1,932	증)0.302	증)134
	고장력 철근(H29)	ton	1.538	683	4.878	834	증)0.340	증)151
소 계						6,444		증)489
1) 직접공사비		식		53,455		67,000		증)13,545
2) 제경비		식		23,020		27,465		증)4,445
3) 도급액		식		76,475		94,465		증)17,990

Ⅲ

건설사업관리기술단 의견

○ 산업대3길고가 정비공사와 관련하여 향후 행복주택 건설 및 주변 개발에 따른 대형차량(소방차,대형버스 등)의 원활한 소통과 대중교통 노선 변경 등에 유연하게 대응할 수 있도록 산업대3길 고가의 시설한계를 변경(4.2m→4.5m) 함은 타당하며 물량과 공사비 산정은 적절한 것으로 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 방재시설부-13569(2015.10.12.)호, 산업대3길 고가 정비보완 검토 및 추진요청에 따른 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인 통보코자 하며, 차후 설계 변경 시 반영토록 조치하고자 합니다.

붙  임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.