서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

1. 공공재생과-1926('16.2.29)호와 관련입니다.

2.「예장자락 남산공원 재생사업 설계공모 관리용역」에 대하여 아래와 같이 용역 준공기한 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 예장자락 남산공원 재생사업 설계공고 관리용역

- 계 약 자 : 국립한밭대학교 산학협력단 대표 이재홍

- 계약금액 : 129,712천원

나. 준공기한 연기 내용

구분	용역기간	용역비(계약금액)	비고
당초	2015. 11. 2.~2016. 3. 2	129,712,000	용역비 변동없음
변경	2015. 11. 2.~2016. 4. 2

붙임 : 1. 방침서. 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서. 1부.

3. 합의각서. 1부. 끝.

	공공재생과장
주무관	배현경		사업관리팀장	代박일형		공공재생과장	02/29 홍선기
협조자
시행	공공재생과-1930	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-8649	/전송	2133-0885	/	xodiddls@seoul.go.kr	/	대시민공개