문서번호	교통운영과-3618
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통운영팀장	교통운영과장
백바름	김홍식	02/29 강진동

2016년 제2차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2

『2016년  제3차 도로점용공사장』

교통소통대책 자문회의 결과 보고

자문회의 개최 개요

❍ 개최일자 : 2016 2. 25(목) 12:00 ~ 18:00

❍ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층회의실

❍ 참석위원 : 9명(당연직 : 1명, 위촉직 : 8명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : 신건철 위원, 이동원 위원, 신치현 위원, 송두석 위원, 이지언 위원, 김은경 위원, 박규영 위원, 천승훈 위원

- 간  사 : 교통운영팀장

❍ 자문대상 및 결과 : 총 12건 (시행 2건, 조건부 시행 9건, 재심의 1건)

- 서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사 : 재심의 (1, 5구간 소위원회 별도 심의)

※ 공사 일정으로 인해 1구간, 5구간은 소위원회로 별도 검토 후 심의결과 통보

- 올림픽대교 남단 IC 구조개선공사 : 조건부 시행

- 녹번2배수분구 하수관로 종합정비공사(1공구) : 조건부 시행

- 녹번2배수분구 하수관로 종합정비공사(2공구) : 조건부 시행

- 하계배수분구 하수관로 종합정비공사(3차) : 조건부 시행

- 종로 역사 문화 보행환경 조성공사(3차) : 시행

- 서울역 환승센터 시설물 보수 공사 : 조건부 시행

- 분당선 선릉역외 3개역사 승강설비설치 기타공사 : 조건부 시행

- 대치역사거리 주변 침수해소 공사 : 조건부 시행

- 둔촌로 하수암거 신설공사 1공구(변경) : 조건부 시행

- 서울중앙지사 열배관 공사 : 시행

- 금천구 지구단위계획 군부대부지 특별계획구역 내 기반시설공사 : 조건부 시행

자문안건(1) : 서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
서부 간선도로	2016.3.1. ∼2021.2.28	전일 (00:00∼24:00)	6.90m ∼16.15m	현대건설주식회사

❍ 자문결과 : 재심의 (1, 5구간 소위원회 별도 심의)

❍ 자문회의 검토의견

- 공사단계별 차로점용 계획 및 개선대책에 대해 면밀하고 심도있는 검토가 필요한 공사로 금번 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의로 검토하기에 절대적 검토 기간이 부족한 상태로 판단됨

- 상습정체 구간인 서부간선도로 및 주변가로의 교통상황을 고려하여 볼 때 통행 불편사항(본선 및 주변교차로의 극심한 정체 등)이 빈번히 발생할 것으로 판단되오니 도로점용공사에 대한 적극적인 홍보 전략이 필요함

- 또한 도로점용공사에 대한 광역적이고 적극적인 소통대책을 검토·수립해야 하며, Micro 시뮬레이션 분석 등 용량 감소에 대한 정밀한 분석(방향별 대기행렬 등)이 필요함

- 따라서 『서부간선도로지하도로 민간투자사업 건설공사』는 자료 보완 후 재심의하도록 하며, 공사 일정에 따라 1, 5구간은 소위원회로 별도 검토하여 심의결과를 통보토록 함

⇒ 2016.03.04. 서부간선도로 민간투자사업 건설공사 1, 5구간 소위원회 개최

자문안건(2) : 올림픽대교 남단 IC 구조개선공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
올림픽대로	41개월간	주·야간	무(無)	미정

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 야간공사에 대한 사전 안내시스템 보완 및 공사현장 시인성 확보(조명시설 등)

자문안건(3) : 녹번2배수분구 하수관로 종합정비공사 (1공구)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
진흥로 등 4개	2016.3.1. ∼2016.12.20	주간 (09:00∼18:00)	1개 차로	용일토건(주)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 보행통로의 최소 유효폭 2.0m 이상 확보 검토 (1.0m 이상 절대 확보) 바람

- 세부단계별 LOS 분석 결과 및 명확한 공사 시간대를 제시하기 바람

- 굴착표준도(p.18)를 재검토하여 설계도에 보완 반영토록 함

- 총괄도 및 단계별 교통관리계획도에 공사 진행방향과 하수관로를 표현하기 바람

자문안건(4) : 녹번2배수분구 하수관로 종합정비공사 (2공구)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
은평로	2016.3.15. ∼2016.10.31	주·야간	2개 차로	미관건설(주)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 장마철 강우 강도가 높을 시를 대비하여 공사 공정, 인력관리 등에 대한 철저한 계획을 수립하기 바람

- 1단계 공사기간을 단축할 수 있도록 주·야간 공사 및 전일 점용에 대해 검토하기 바라며, 이에 대한 교통상황 분석 결과를 제시하기 바람 (교차로와 가로구간을 단계별로 세분화하여 분석)

- 23단계 남측접근로 상위차로(직진) 통제 및 차로운영을 재검토하고, 31단계 유턴차로 연장에 대해 검토 바람

- 42단계 우회전차로에 대한 도안전성 확보를 위해 차로운영 재검토 바람

- 52단계, 61단계 등 진출·입차량이 양방통행이 가능하도록 조치 바람

- 82단계 교통소통 수준을 유지하기 위해 야간공사 또는 주·야간 공사 검토

- 92단계 우회전차량에 대한 안전 개선대책을 재검토하기 바람

- 82단계, 9단계 등 장비 회전 반경 및 통행구간을 감안하여 점용면적을 재검토하기 바람

자문안건(5) : 하계 배수분구 하수관거 종합정비사업(3차년도)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
한글비석로 등 3개	2016.3.16. ~2016.10.31	야간 (22:00∼06:00)	4.0∼5.0m	1단계 : ㈜한웅건설 2단계 : 예스지신성건설(주)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 총괄도 및 단계별 교통관리계획도에 공사 진행방향과 하수관로를 표현하기 바람

- 지역 통행특성을 고려하여 공사 작업은 05시에 완료하기 바람 (노선버스 운행 전에 완료)

- 1단계, 8단계 교차로 부근 공사 시행시 장비 회전 반경 및 통행구간을 감안하여 점용면적을 재검토하기 바람

- 12단계 우회전 처리에 대해 안전 개선대책을 보완 수립하기 바람

- 교차로 부근 공사 시행시 신호주기를 첨부하여 주시기 바라며, 차로운영 관련 라바콘 설치 수량에 대해 재검토하기 바람

- 현장 이행점검에 대한 철저한 계획을 수립하기 바라며, 향후 IP 카메라 등 현장점검 시설물 관련 설치 검토 바람

자문안건(6) : 종로 역사·문화 보행환경 정비사업(2차)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
종로	2016.3.21. ∼2016.5.19	야간 (00:00∼06:00)	1개 차로	미정

❍ 자문결과 : 시행

- 도로점용공사로 인한 교통영향이 최소화되도록 하기시 바라며, 도로추가점유 필요시 사전협의 및 승인을 득한후 공사 진행하기 바람

자문안건(7) : 서울역 버스호나승센터 보수 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
한강대로	2016.3.7. ∼2016.4.8	야간 (22:00∼06:00)	1개 차로	지스마트글로벌(주)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 1, 3단계에서 진행방향의 정지선에 가까운 일부구간은 조기 원상 복구하는 방안을 검토하기 바라며, 3단계 양방향 보행이 가능하도록 보행공간을 확보하기 바람

- 2단계 공사는 버스 미운행 시간대(올빼미 버스 제외)로 시행하기 바라며, 공사 시간대 올빼미 버스는 3번 승강장으로 이전하고 그에 대한 철저한 사전 홍보 및 안내가 필요함

자문안건(8) : 분당선 선릉역 외 2개역사 승강설비설치 기타공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
테헤란로 등 3개	2016.3.1. ∼2017.9.6	전일	1개 차로	일성건설(주)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 차로점용으로 인해 영향을 받는 접근로별 교통상황을 분석하기 바라며, 보행 수요 및 분석을 세밀하게 검토 후 제시하기 바람

- 차량진입이 필요한 시간대 및 기간을 재검토하여 점용기간(시간)을 최소화 할 수 있도록 반드시 검토 후 제시하기 바람

- 공사 단계에 따른 교통처리대책을 세분화하여 수립하고, 선릉역 보행통로 폭을 최대한 확대 확보할 수 있도록 재검토 바람

- 선릉역, 대모산역 복공 계획을 함께 고려하여 점유면적을 재검토하기 바람

- 개포동역 횡단보도 앞 대기공간을 확보하기 바람

- 선릉역 승강설비설치공사에 대한 보행 분석을 제시하고, 사업 타당성에 대해 재검토하기 바람

자문안건(9) : 대치역사거리 주변 침수해소 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
영동대로 합류도로	2016.3.20. ∼2016.9.20	전일	1개 차로	강남구청

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 도로점용 및 우회경로 정보를 강남대로까지 확대하여 제공하기 바라며, 주변 지역주민에게 홍보할 전략(아파트 방송, 안내문 등)을 철저하게 수립하기 바람

- 주요 우회경로 및 교차로(대치역사거리 등)에 대한 교통상황 분석 후 제시하기 바람

- 공영주차장 유턴구역에 대해 교통안전시설물 보완 및 정형화된 차로운영을  검토하기 바람

자문안건(10) : 둔촌로 하수암거 신설공사 1공구(변경)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
양재대로	2016.3.21. ∼2016.12.31	전일	2∼3개 차로	임원개발(주)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 자재 적치공간을 도로점용 구간와 동일한 동선으로 검토하기 바라며, 자재 이동의 빈도수를 최소화할 수 있는 전략을 수립하기 바람

자문안건(11) : 2016년 서울중앙지사 열배관공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
매봉산로 등 3개	2016.4.1. ∼2016.6.9	전일	1∼2개 차로	주식회사 거륜에너텍

❍ 자문결과 : 시행

- 도로점용공사로 인한 교통영향이 최소화되도록 하기시 바라며, 도로추가점유 필요시 사전협의 및 승인을 득한후 공사 진행하기 바람

자문안건(12) : 금천구 지구단위계획 군부대 특별 계회구역 내 기발시설 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
시흐대로 등 2개	2016.3∼2016.6	전일	1개차로	㈜삼미건설

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 2구간 자전거·보행 겸용 안내표지 설치 및 주차구역 진입경로 확보방안 검토

- 1구간 유출입부 통제에 대한 안내표지 설치 검토

붙 임 : 1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단. 1부. 끝.