서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	고양시 삼성지하차도 공사기간 연장에 따른 임시우회운행 연장 통보

한국철도시설공단에서 시행하는 고양시 삼성건널목 지하차도 공사 기간이 연장됨에 따라, 도로통제구간 운행 버스 노선에 대해 여객자동차운수사업법 제23조 규정에 의거 아래와 같이 임시우회운행을 명령하니, 버스회사에서는 안전운전 및 대시민 홍보에, 관련부서에서는 소관업무 추진에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 변경 사항

○ 공사 구간 : 고양시 삼성지하차도

○ 시 행 청  : 한국철도시설공단

○ 공사 기간

- 당 초 : 2015. 7.14(화) ~ 2016.02.29.(월)

- 변 경 : 2015. 7.14(화) ~ 2016.03.05.(토), 14:00

※ 한국철도시설공단과 고양시청간 시설물 인수인계 점검 결과에 따라 변동 가능

나. 임시우회운행

○ 우회운행 노선 : 2개 노선

- 707번(동해운수), 9707번(선진운수)

○ 임시우회운행 : 우회운행계획에 따라 3.5(토)까지 연장운행.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	교통정보과장,시민봉사담당관,고양시장(대중교통과장),동해운수,선진운수
주무관	김상신		노선팀장	김홍진		버스정책과장	02/29 이상훈
협조자
시행	버스정책과-3639	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 7층 버스정책과	/
전화	02-2133-2282	/전송	02-2133-1049	/	shinii@seoul.go.kr	/	대시민공개