문서번호	여의도공원관리사무소-785
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장	서부공원녹지사업소장
박현주	송규환	박원근	02/29 오진완
협 조

『선유도공원 수목외과수술 등』

생육환경 개선사업 추진계획

2016.  2.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

『선유도공원 수목외과수술 등』

생육환경 개선사업 추진계획

선유도공원 내 대형목, 불량목에 대해 외과수술 및 수형조절 등 생육환경개선을 통해 건강하고 쾌적한 공원 환경을 제공하고자 함

Ⅰ		현황조사 결과

위    치 : 선유도공원 선유교 주변 등 6개소

대    상 : 미루나무 등 6종 17주

❍ 선유교 등 4개소 :  미루나무 등 6종 12주 공동(부패부) 발생

❍ 시간의 정원 등 2개소 : 미루나무 등 2종 5주 생육상태 불량

선유교 미루나무 기울어짐	미루나무 부패부 발생
카페나루 앞 버드나무 공동(부패부) 발생	시간의 정원 앞 단풍나무 생육환경개선 필요

Ⅱ		추 진 방 향

수목외과수술

❍ 수목 공동발생 부위 부패부 제거 및 살균·방부처리, 공동충전 후 인공수피로 피복하여 수목 생육 개선

생육환경개선

❍ 수형조절, 복토제거, 생리증진제처리, 연결 브레싱 설치 등 수목 상태별 적합한 수목치료 실시

Ⅲ		사 업 개 요

위    치 : 선유도공원 선유교 주변 등 6개소

사업대상 : 미루나무 등 6종 17주

사업내용 : 외과수술 및 생육환경개선

사업기간 : 2016. 2. ~ 4.

소요예산 : 15백만원

예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 산하공원운영, 선유도공원 유지관리, 시설비

시행방법 : 수목치료 전문업체 시행

계약방법 : 수의계약

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호(소액)

❍ 수목피해 진단·치유 전문 산림사업법인(나무병원)면허를 소지한 업체와 수의계약 시행

- (주)한강나무병원 대표 이상길

Ⅳ		추 진 일 정

2016. 2.       : 현장조사 및 설계

2016. 3. ~ 4. : 공사발주 및 시행

Ⅴ		기 대 효 과

수목별 맞춤형 치료로 생육환경을 개선하여 건강하고 쾌적한 공원환경 조성

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.