문서번호	도시철도토목부-2398
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		김성호	02/29 김진팔
협 조
	주무관			김용선

『지하철9호선 3단계 923공구 건설공사』

예비준공검사 결과보고(6차)

2016. 02

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『지하철9호선 3단계 923공구 건설공사』

예비 준공검사 결과 보고(6차)

지하철9호선 3단계 923공구 6차공사에 대한 준공 기한내 공사 완공 가능여부 및 미진사항의 사전 보완을 위하여 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ

공사 개요

○ 사 업 명 : 서울지하철9호선 3단계 923공구 건설공사

○ 사업규모 : 총연장 1,728m

- 본선 : 1,524m(개착1,114m, 터널410m)

- 정거장 : 204m(1개소), 환기구(4개소)

○ 사업기간 : ‘10.09.20 ~ ‘16.03.21

○ 사 업 비 : 98,224백만원

○ 계 약 자 : 대림산업(주) 외 4개사

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단 건축사무소

Ⅱ

예비 준공검사 현황

○ 일    시 : ‘16.02.18(목)

○ 장    소 : 923공구 회의실 및 현장

○ 예비준공검사자 : 도시철도토목부 정중규, 이경훈

○ 예비준공검사 입회자

- 감리단

· 기술지원건설사업기술자(토질분야 : 김제규, · 구조분야 : 김진윤)

· 책임감리원 : 권일순

- 현장대리인 : 최경호

Ⅲ

6차공사 추진현황

○ 공사기간 : ‘15.07.21 ~ ‘16.03.21

○ 계약금액 : 금10,460백만원

○ 공 정 율 : 60.82%

○ 6차공사 추진현황

(단위 : 백만원)

구 분	계 약	실 적	잔 량	비 고
금 액	10,460	6,361	4,099

○ 6차공사 시공 및 미시공 현황

구간 및 공종		단 위	계약분		시공분		잔여분		비 고
			계약 수량	금액	시공량	금액	잔량	금액
본선개착	토공	㎥	10,099	311	10,099	274	-	37
	버팀보	본	140	635	140	561	-	74
	구조물	㎥	3,718	1088	695	326	3,023	762
본선터널	매입전설치	조	164	132	-	-	164	132
938정거장	토공	㎥	7,218	91	2,397	35	4,821	56
	버팀보	본	244	493	-	283	244	210
	구조물	㎥	5,700	1,239	5,700	1,163	-	76
본선환기구 (937S2)	토공	㎥	-	-	-	-	-	-
	버팀보철거	본	127	12	127	12	-	-
	구조물	㎥	-	1	-	1	-	-
본선환기구 (937E2)	토공	㎥	-	-	-	-	-	-
	버팀보철거	본	60	7	43	5	17	2
	구조물	㎥	1,089	223	-	-	1,089	223
본선환기구 (938E1)	토공	㎥	-	-	-	-	-	-
	버팀보	본	-	-	-	-	-	-
	구조물	㎥	-	-	-	-	-	-
본선환기구 (938S1)	토공	㎥	13,965	185	13,771	159	194	26
	버팀보	본	126	434	126	265	-	169
	구조물	㎥	1,460	307	-	-	1,460	307
기타		식	1	2,446	1	1,047	1	1,399
직접공사비				7,604		4,130		3,474
간접공사비				2,221		1,730		491
물가변동(1,2,3회)				635		501		134
도급비				10,460		6,361		4,099

Ⅳ

예비준공검사 결과 및 조치계획

○ 예비준공검사 현 시점에서 잔여물량(4,099백만원)에 대해 준공일(‘16.03.21)전까지 완공이 어려울 것으로 판단되는 바, 잔여공사의 공정관리에 대해 대책을 강구하여 공사가 완공 될 수 있도록 책임감리사(동명기술공단)에 통보코자함.

붙 임 : 예비준공검사 서류 1부.  끝.