문서번호	시설보수과-705
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	서부도로사업소장
김종성	신동헌	01/28 김만수
협 조
	주무관		김지환

『남산1호터널외 6개소 정밀점검용역』

자문회의 개최 결과 및 준공기한 연기보고

2014. 1

서부도로사업소

(시설보수과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	외부전문가	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	시설물 안전관리에관한 특별법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『남산1호터널외 6개소 정밀점검용역』

자문회의 개최결과 및 준공기한 연기 보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 『남산1호터널 외 6개소 정밀점검용역』 추진사항에 대한 자문회의 개최 결과 및 준공기한 연기 검토 보고임.

용역개요

◦ 용 역 명 : 남산1호터널외 6개소 정밀점검용역

◦ 대상시설 : 남산1호터널, 남산2호터널, 남산3호터널, 증산지하보차도,           금화터널, 남산2호터널입구지하차도, 이태원지하차도

◦ 용역기간 : 2013. 6. 4 ~ 2014. 1. 29

◦ 계약금액 : 143,200천원

◦ 용 역 사 : 비앤티엔지니어링㈜

자문회의 개최 현황

◦ 일    시 : 2014. 1. 24(금) 17:00 ~ 19:00

◦ 장    소 : 서부도로사업소 2층 소회의실

◦ 참 석 자 : 9명

- 사 업 소(3) : 시설보수과장, 팀장, 담당자

- 용 역 사(4) : 책임기술자 이호영 외 3명

- 자문위원(2) : 박훈규(유원이엔씨), 남상진(동해종합기술공사)

◦ 보고 및 자문내용

- 정밀점검용역 추진현황, 외관조사·재료시험 및 상태평가 결과 보고

- 용역 결과에 대한 전반적인 외부전문가 자문

주요 자문의견

박훈규 위원

구 분	자 문 내 용
공통사항	· 표면처리보수는 가급적 지양 · 균열폭 0.3mm이상은 주입보수가 이루어 질수 있도록 방안제시
남산1호,2호,3호,금화터널	· 정기적 내공변위 측정이나 단면측량을 할 수 있도록 언급 요망
남산1호터널	· 발생 손상에 대한 원인 언급 요망
남산2호터널	· 정기적 내공변위 측정이나 단면측량을 할 수 있도록 언급 요망 · 종방향 유공관 결함의 보수 방향을 제시
금화터널	· 정기적 내공변위 측정이나 단면측량을 할 수 있도록 언급 요망 · 포장부 횡균열 등 손상부에 대해 바닥콘크리트 코어 확인 조사가 이루어 질 수 있도록 언급요망

남상진 위원

구 분	자 문 내 용
공통사항	· 타일 부착기준 강도 제시 · 철근 탐사 시험의 조사두께와 배근간격 적정성을 판단 할 수 있는 설계 자료 제시
남산1호터널	· 공동구 덮개 파손 대책 제시 · 공동구 상부슬래브 열화 확인을 위한 포장부 코어채취 · 갱구부 암반 사면의 퐁화손상은 전문가 자문을 통한 대책수립 필요
남산2호터널	· 시점부 좌측 옹벽 구간 균열에 대해 주입 보수 후 신축 줄눈 설치 검토 · 시점부(장충동측) 갱구부 상단 암반사면의 퐁화손상은 전문가 자문을 통한 대책수립 필요

남산3호터널	· 종점부(이태원측) 갱문 상단 좌·우 사면의 격자블럭 파손 및 변형에 대해 전문가의 자문을 통한 대책 수립 필요
이태원 지하차도	· 포장의 손상에 대한 원인 및 분석 명기바람 · 중앙기둥 손상구간에 대한 주철근 상세 조사
금화터널	· 0.3mm미만 균열 발생 손상에 대한 원인 분석 명기바람
증 산 지하차도	· 지하철 통과구간 손상 상태 조사와 구조물 이력조사 명기바람
남산2호 터널입구 지하차도	· 보수·보강을 위한 교통 우회로 등을 조사하여 명기바람

과장님 검토의견

- 남산1호터널 · 2호터널 · 3호터널 갱구부 암반사면에 대한 전문가 자문이 필요함

- 2호터널 입구 지하차도 보수시 교통우회로 조사 필요

준공기한 연기 검토

◦ 관련근거 : 용역사의 준공기한 연장요청(비앤티 제14-9호)에 따른 검토

◦ 연기사유

- 용역기간 중 2013.6.4 ~ 9.14까지 약 93일간 장마철 비로 인한 현장조사 곤란

- 과업대상인 남산1호터널 · 2호터널 · 3호터널 갱구부 암반사면에 대한 전문가 자문 등 대상 시설물 정밀점검 추가 조사 필요

◦ 준공기한 연기

- (당초) : 2013. 6. 4 ~ 2014. 1. 29

- (변경) : 2013. 6. 4 ~ 2014. 2. 18 (20일 연장)

◦ 지체상금 부과여부 : 미부과

향후계획

◦ 자문회의 결과 용역사에 통보하여 보완조치

◦ ‘14. 1월   : 준공기한 연기 시행

◦ ‘14. 2월   : 현장 추가 조사 및 보완

◦ ‘14. 2. 18 : 용역 준공

붙임 : 위원별 자문의견서 각1부.  끝.