문서번호	물재생계획과-2776
결재일자	2016.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	하수관리팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
배원영	김재승	하상문		03/02 권기욱
협 조
	하수정보팀장		代황종환
	하수정비팀장		최병출

하수관로 정비사업 공정관리 추진계획

2016. 2.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

하수관로 정비사업 공정관리 추진계획

2016년 조기집행 상반기 목표달성(58%)에 따른 효율적인 예산집행관리와 우기전(6월30일) 하수관로 정비사업이 효과적으로 완료될 수 있도록 자치구 건설국장 및 하수과장 정례회의를 추진하여 공정관리에 만전을 기하고자 함

2016 하수관로 정비사업(자치구 재배정) 개요

사업명		규 모	예산액 (백만원)
합 계		-	323,609
주민참여 사업		19건 L=4.0㎞	3,153
하수관로 신설개량		64건 L=23.2㎞	102,827
하수관로 종합정비		25건 L=81.0㎞	123,195
하수관로 보수보강	원형관로	34건 L=29.0㎞	31,046
	사각형거	61건 L=80.0km	49,588
빗물받이 유입시설 확충 및 이설		25개 자치구 N=870 개소	1,800
하수관로 유지관리(준설)		관내 하수도 준설 L=1,899km	12,000

회의개요

❍ 추진기간 : ‘16. 3. 9 ~ 5. 18(매주 수요일)

❍ 회의장소 : 서소문 별관 1동 8층 물순환안전국 회의실

※ 총 10회 : 자치구 하수과장 및 건설교통국장 (권역별로 회의)

❍ 회의주재 : 물순환안전국장, 물재생계획과장

❍ 회의내용 : 자치구별 공사추진실적 보고(문제점 및 현안사항)

❍ 권역별 자치구 공정회의 일시 및 참석대상

※ 물순환안전국 일정상 회의시간 변경될 수 있음

구분	자치구명	회의일시 및 참석자	회의주관
도심권 및 서북권 (7)	종로,중구,용산,성동, 은평,서대문,마포	- 3.9(수) 16시 : 하수과장 4.6(수) 14시 : 하수과장	물재생계획과장
서남권 (6)	양천,강서,구로, 금천,영등포,동작	- 3.16(수) 16시 : 하수과장 4.20(수) 16시 : 하수과장	물재생계획과장
동북권 (7)	광진,동대문,중랑, 성북,강북,도봉,노원	3.23(수) 16시 : 하수과장 4.27(수) 16시 : 하수과장	물재생계획과장
동남권 (5)	관악,서초, 강남,송파,강동	- 3.30(수) 16시 : 하수과장 5. 4(수) 14시 : 하수과장	물재생계획과장
강북권 (13)	종로,중구,용산,성동,광진 동대문,중랑,성북,강북,도봉, 노원, 은평, 서대문	5. 11(수) 14시 : 건설교통국장	물순환안전국장
강남권 (12)	마포,양천,강서,구로,금천 영등포,동작,관악,서초, 강남,송파,강동	5. 18(수) 14시 : 건설교통국장	물순환안전국장

중점논의 사항

❍ 자치구별 추진사업에 대한 공정관리 목표 적정여부

❍ 34개 침수취약지역에 대한 사업 추진 현황

❍ 조기집행에 따른 상반기 집행 58% 달성 여부

❍ 우기철 하수도 공사장 안전관리대책

- 공사장별로 비상연락망 구축 및 수방대책 현황

- 비관리청 하수사업 현황파악 및 현장순찰 강화

- 돌발강우시 하수사업 공사장별 안전관리 대책 현황

- 하수도로 인한 도로함몰(공사, 노후 등) 발생시 신속한 초기대응 및 상황보고 철저

❍ 시민불편 최소화 방안 이행여부

- 소음‧진동 최소화, 보행권 확보, 대시민 홍보 등

행정사항

❍ 하수도 공사장 공정관리계획을 자치구에 통보하고,

❍ 회의자료는 필히 회의개최 2일전까지 물재생계획과로 제출 요망

❍ 공정회의시 문제점에 대한 대책 보고

❍ 부진사업장 시·구 합동대책회의 및 현장조사 별도 시행

붙 임)  1. 회의자료 양식 1부 끝.