투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	조달청장(예산사업관리과장)
(경유)
제목	물가변동으로 인한 계약금액 조정 사전 검토의뢰 〔하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 건설사업관리용역〕

1. 우리 본부에서 관리·감독중인 「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」은 기획재정부에서 관리하는 총사업비 관리대상 용역으로서 『총사업비 관리지침』에 의거 붙임와 같이 물가변동으로 인한 총사업비를 조정하고자 사전검토를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

나. 계약번호 : 20150******** 00

다. 용역기간 : 2015.03.13. ～ 2019.04.10.

라. 계약금액 : 3,593,800,000원

마. 물가변동 적용내용(1회)

1) 용역 계약금액     : 3,593,800,000원

2) 비적용 대상금액   :   347,260,064원

3) 물가변동 적용대가 : 3,246,539,936원

4) 품목 조정율       : 3.33%

5) 물가변동 경과기간 : ’15.03.06. ~ ’16.01.01.(300일)

6) 선금급 공제액     : 없음

7) 실 조정금액       : 108,109,000원

따로붙임 : 물가변동(1회) 검토자료 1부(별도송부). 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이경훈		토목1과장	김성호		도시철도토목부장	03/03 김진팔
협조자	주무관	정삼기
시행	도시철도토목부-2542	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 9층(도시철도토목부)	/
전화	02-772-7212	/전송	02-772-7306	/	lkh00n@seoul.go.kr	/	대시민공개