문서번호	기전과-2650
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	강서도로사업소장
한영호		박재경	03/03 신현태
협조

『서부트럭터미널앞 지하차도』

지상관리실 설치완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  2.

강서도로사업소

(기 전 과)

『서부트럭터미널앞 지하차도』

지상관리실 설치완료 보고

인수대상 시설물인 「서부트럭터미널앞 지하차도」 지상 관리실의

추가 설치를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 지상 관리실 설치 추진경위

- 2014. 12. 31 : 서부트럭터미널앞지하차도 기전설비 인수

(도시기반본부 설비부 → 기전과)

- 2015. 02. 03 : 근무자들의 지하(제어실) 근무 어려움 호소에 따라                       시공부서(토목부)에 지상 관리실 설치요구

- 2015. 04. 27 : 토목부에서 지상 관리실 설치를 위한 부지확보 요청

(양천구청 건축과)

- 2015. 05. 12 : 청소년힐링센터 건립 예정부지 사유로 설치불가 통보

- 2015. 09. 11 : 토목부에서 조립식주택(관리실) 설치를 위한 도로점용

및 가설건축물축조허가 신청

(양천구청 건설관리과, 건축과)

- 2015. 09. 24 : 양천구청에서 도로점용 및 건축물축조허가 처리통보

- 2015. 12. 23 : 조립식주택 관리실 설치완료

- 2016. 02. 29 : 원격감시 모니터링시스템 이전완료

□ 관리실 설치내역

◯ 관리실 제원

- 종      류 : 이동용 조립식주택

- 규      격 : 경량철 2층 구조(B3.5m×L9.0m×H5.5m)

- 방호울타리 : W2.0m × H1.2m × 8경간

◯ 설치비용 : 43,000천원

- 조립시 주택 구입비 : 35,000,000원

- 원격감시 시스템 이전비 : 8,000,000원

◯ 제조회사 : 경기도 화성시 송산면 봉가리 303-1

모든테크  대표 이상윤 (☏ 031-356-9989)

□ 행정사항

◯ 2016년 시유재산 공제가입 신청(본청 재산관리과)

- 신청대상 : 서부트럭터미널앞 지하차도 지상관리실

- 보험금액 : 14,968원

붙임 : 1. 관리실 설치 현장사진 1부.

2. 설치비용 내역서 1부.

3. 준공도면 3부.  끝.