문서번호	시설개선과-2081
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김기탁		박관현	03/03 최용덕
협 조

잠실주경기장 단극선로 개선 등

전 기 공 사  보 고(연간단가공사)

2016. 3.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실주경기장 단극선로 개선 등 전기공사 보고

주경기장 석면 철거해체 구간에 대한 안전감사 지적사항 보완 및 건축·설비공사에 따른 전기공사 등을 시행하여 전기시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 석면텍스 등 철거해체 공사 추진계획(시설개선과-976, 2016.1.29.)

❍ 2015년 6~7월 안전감사 지적사항

- 단극스위치를 누전차단기로 교체하여 안전사고 예방

잠실주경기장 B, C구간 단극스위치

❍ 잠실야구장 시설물유지보수 계획보고(시설개선과-1515, 1996)

- 1층 로비 구간 석면 건축자재 교체, 미화원 샤워장 설치

❍ 야구장 주차장 타워등 LED 교체 계획(시설개선과-1632, 2016.2.22.)

❍ 주차관리 현장근로자 남성휴게실 관련 시설공사 협조 요청(운영기획과-2242, 2016.2.22.)

❍ 잠실야구장 급배수설비 교체 계획(시설개선과-1069, 2016.2.2.)

Ⅱ		공사개요

❍ 공사내용

- 잠실주경기장 석면텍스 철거작업과 병행하여 단극선로 개선

․ B,C구역 단극선로 개선을 위한 조명 및 전열선로 재설치

[잠실주경기장 단극선로 개선 현황] 총 12구역 중 2구역 개선
	총 구역	단극선로구역	개선완료구역	비고
	12개구역 (A~L구간)	10구역 (B,C,D,E,F,G,H,I,K,L)	2구역 (A, J구역)
※ 미개선 구역은 석면텍스 철거시기에 개선하고자 함.

- 잠실야구장 1층 로비 석면철거에 따른 조명 철거설치(58개)

- 잠실야구장 미화원 샤워실 설치에 따른 조명 및 전열공사

- 잠실야구장 주차장 타워조명 LED 교체공사(200W×16개)

- 잠실야구장 급배수용 부스터펌프(33KW×2대) 교체에 따른 전원공급공사

․ 전력케이블 설치 270m, 강제전선관 설치 53m

❍ 공사기간 : 2016. 3월 ~ 5.31.

❍ 공 사 비 : 71,739천원

Ⅲ		조치계획

❍ 「2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가)」 계약업체에 작업시시하여

조치하고 추후 정산하고자 함.

첨부  1. 내역서 및 도면 각 1부

2. 관련 보고서 1부. 끝.