문서번호	시설과-1510
결재일자	2016.3.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
김기수		김한준	03/03 이용태
협조	주무관		전정아
	조경팀장		남상국

『남산공원 녹지복원사업』 설계변경 검토보고

2016. 3.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『남산공원 녹지복원사업』

설계변경 검토보고

『남산공원 녹지복원사업』 시행과 관련하여 현장여건 변경사항을 반영하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

공사현황

공 사 명 : 남산공원 녹지복원사업

도급금액 : 금292,660,000원

공사기간 : 2015. 12. 7. ~ 2016. 4. 6. (공정율 60%)

공사내용

- 식재공사

· 교목류 : 산딸, 산사나무 등 4종 68주

· 관목류 : 진달래, 생강나무 등 9종 7,355주

· 초화류 : 돌단풍, 바위취, 꼬리조팝 등 8종 2,830본

- 시설물정비 : 폐쇄약수터 3개소 및 저류조 3개소 정비, 휴게쉼터 1개소 정비

도 급 자 : 임원개발주식회사 대표 이대성

설계변경 주요내용

구 분	주 요 변 경 내 용	비 고
수목식재	▶ 현장여건 변경에 따른 식재물량 변경 - 한남자락 식목행사 대상지 식재물량 제외 ·교목 : 산딸나무 등 2종 38주 → 0주(감38주) ·관목 : 진달래등 6종 4,760주 → 0주(감4,760주) - 남측순환로 사면부 경관개선을 위한 식생매트 설치(관급) ·관목 : 화살나무 816주 → 0주(감816주) ·식생매트 : 구절초,감국 등 6종 234㎡(증234㎡)	기보고

구 분	주 요 변 경 내 용	비 고
시설물 정비	▶ 콘크리트 저수조 철거물량 변경 - 저수조 내부 벽체물량 추가발생 및 콘크리트깨기(무근→철근) 변경에 따른 물량증감사항 반영 ·무근콘크리트깨기 462㎥ → 162㎥(감300㎥) ·철근콘크리트깨기 0㎥ → 579㎥(증579㎥) ▶ 저수조 철거후 복토물량 변경 - 현장 주변의 기존흙 최대한 활용하여 복토물량 감소 ·복토물량 2,388㎥ → 1,401㎥(감987㎥) ▶ 산책로 복구에 따른 야자매트 설치 - 한남저수조 진입로 및 신남산약수터 진입로 야자매트 설치(관급) ·야자매트 0m → 110m(증110m)	기보고
시설물 정비	▶ 후암약수터 정비지역 시설보완 - 후암약수터 정비지역 경사면으로 인한 안전휀스설치 필요 ·목재휀스 0경간 → 8경간(증8경간) - 기존 파고라는 상태가 양호하고 등산객들의 휴식공간으로 이용하고 있어 재활용 하고자 함(오일스테인 정비) ▶ 상춘약수터 노후 목재계단 정비 - 상춘약수터 목재계단이 노후되어 정비가 필요(시민요구사항) ·목재계단 0단 → 9단(증9단)	추가사항

총공사비 (감13,886,770원)

(단위:원)

구 분		도 급 비 (원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
합 계		295,492,970	280,781,200	감13,886,770
도급비	공 급 가 액	266,054,546	235,027,273	감31,027,273
	부가가치세	26,605,454	23,502,727	감3,102,727
	계	292,660,000	258,530,000	감34,130,000
관급자재비		2,832,970	23,076,200	증20,243,230

검토의견

설계변경 주요내용은 식목행사 대상지로 인한 수목식재 물량변경   사항, 저수조내부 벽체물량 증가사항 등 불가피한 변경사항으로

현장여건에 맞게 물량조정하여 공사추진에 만전을 다하고자 하며,

이용 시민들의 요구사항을 최대한 반영하여 안전하게 이용할 수    있도록 정비하고자 함.

※ 본 공사의 감액금액은 저수조 벽체물량 증가에 따른 폐기물 처리 물량이

증가되어 부족한 폐기물처리비에 추가반영 예정(증13,761,000원)

붙임  1. 실정사항 검토보고서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.   끝.