문서번호	토목부-3992
결재일자	2016.3.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	03/03 김영수
협조

건설사업관리기술자 투입계획 검토보고 (남부순환로~오정대로간 도로개설공사, 4차)

2016. 3.

건설사업관리기술자 투입계획 검토보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

공사 품질 확보를 위한 건설사업관리기술자 투입계획을 검토 보고 드림.

공사현황

○ 사 업 명 : 남부순환로~오정대로간(봉오대로 삼거리간) 도로개설공사

○ 위    치 : 강서구 방화대로 ~ 부천시 오정구 봉오대로 삼거리

○ 규    모 : 도로개설 40m(8차로), 연장 1.23km (부천시 270m)

○ 기    간 : 2010. 9.29. ~ 2016.6.30.(총차)

○ 사 업 비 : 82,700백만원

○ 시 공 사 : 보훈종합건설(주), 감리사 : ㈜수성엔지니어링

○ 공 정 율 : 81%, 도로포장 준비중

실정보고

○ 건설사엄관리기술자 투입 일정 변경 필요

- 천호대로(광나루역) 확장공사외 1개소 전면책임감리용역(5차) 추진중 당초 오정대로 현장의 토목 보조감리원(1명)에 대하여 동절기후 공사 준공까지 원활한 공사품질 확보를 위해 투입일정 조정 필요

- 투입일정변경

기존 ‘16.2.15.~`16.7.31 → 변경 ‘16.3.2.~`16.7.31 (0.5개월축소)

○ ‘16년 감리원 배치기간 변경 계획

구 분		당 초	변 경	비 고
수석감리사		‘15. 4. 1.~‘18 1.31.	‘15. 4. 1.~‘18 1.31.	변경없음
천호대로 (토목)	감리사보	‘15. 4. 1.~‘18 1.31.	‘15. 4. 1.~‘18 1.31.	변경없음
	감리사보	‘15. 4. 1.~‘18 1.31.	‘15. 4. 1.~‘18 1.31.	변경없음
오정대로 (토목)	감리사보	‘15. 4. 1.~‘16 7.31.	‘15. 4. 1.~‘16 7.31.	변경없음
	감리사보	‘15. 4. 1.~‘15 12.31. ‘16.2.15.~‘16.7.31.	‘15. 4. 1.~‘15 12.31. ‘16.3.2.~‘16.7.31.	0.5개월 축소

○ 감리비 검토                                                 (단위 :백만원)

구 분	전 체		장기계속비					비 고
	당 초	변 경	기시행 (‘10~15년)	2016(5차)		장래
				당초	변경	당초	변경
감리비	4,379	4,374.4	3,270.47	752.90	748.30	355.63	351.03	감4.6

검토결과

○ 현장내 건설사엄관리기술자 투입 일정 변경에 따른 책임건설사업관리기술자의 실정 보고가 타당함으로 승인코자 함.

붙임 : 1. 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

2. 용역변경계약서 1부.  끝.