문서번호	교량보수과-445
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		교량보수과장
배상현		01/28 김환겸
협 조
	주무관		나철흠

작업기간 연기 관련 검토 보고

(2013년 자동차전용도로 일상유지보수공사 제13차 작업)

2014. 1

교량보수과

작업기간 연기 관련 검토 보고

(2013년 자동차전용도로 일상유지보수공사 제13차 작업)

자동차전용도로 일상유지 보수공사(연간단가) 제13차 작업지시와 관련하여

작업기간 연기에 대한 검토결과를 보고함.

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 2013년 자동차전용도로 일상유지보수공사(연간단가)

계약금액 : 1,071,807천원

공사기간 : 2013.03.22 ~ 2014.02.28

도 급 자 : 대양건설(주)  최석환

Ⅱ		작업지시 현황

지시번호 2013-13차

► 작업기간 : 2013.12.05 ~ 2014.01.31

► 작업지시내역

연번	시설물명	위 치	공 종	규 격	단위	수량	작업조건		비고
							주간	야간
1	신천2교	A1, P3 P6, P9	신축이음 교체	뉴웨이브 핑거조인트 #50	m	66		○
2	탄천2고가 F램프	P25	신축이음하부 빗물받이 배수홈통	STS, D150	m	30	○		취소
3	탄천2고가 F램프	P22 P24	소파포장복구	야간, 인력식, t=8cm	a	1.9		○	취소
4	탄천2고가 F램프	P22 P24	도막식방수	야간, 고무AP계, 구스톤	m2	190		○
5	탄천1고가 B램프	P3,P5,P7	탄소섬유보강	CF720, 2겹	m2	24.3	○		완료
6	청담1교	슬래브하면 S3	보호막설치	PE매쉬망	m2	15	○		완료

Ⅲ		문제점 및 검토결과

동절기 기온저하로 인해 지연된 나머지 작업공종에 대하여는 기온이 상승

하는 설명절 이후로 작업기간을 연기하여 시행코자 함.

► 제13차 작업지시  당초 : 2013.12.05 ~ 2014.01.31

변경 : 2013.12.05 ~ 2014.02.20

※ 작업취소된 탄천2고가 F램프 교면포장은 2014년 포장정비 예산을 활용하여

시행예정임(관련근거: 교량보수과-395호, 2014.1.24 ‘강구조 시설물(용접분야)

안전점검 결과 조치계획’)

끝.