문서번호	급수운영과-33864
결재일자	2015.12.17.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		동부수도사업소장
박종대	김광운	최명익		12/17 代이만기
협 조

장한평역주변 배수관정비공사 설계변경 및 계약금액 검토 보고

2015. 12

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

장한평역주변 배수관정비공사

설계변경 및 계약금액 검토보고

우리사업소 시행중인 “장한평역주변 배수관정비공사”와 관련하여 신규공종 및 시공물량 증․감에 따른 설계변경 및 계약금액 조정이 요구되어 이를 검토 보고함.

※관련근거 : 서울시시설관리공단 공사감독2처-20457호

(‘15.12.16, 설계변경(정산) 보고서 제출)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 장한평역 주변 배수관 정비공사

○ 공사기간 : 2015. 10. 01. ~ 2015. 12. 31.

○ 계 약 자 : (주)만주산업개발 대표 이애리

○ 공사개요 : D=400mm, L=500m

○ 도 급 액 : ************

□ 보고내용

○ 설계변경 사유

- 실정보고 공사감독2처-18363(‘15.11.12)호외 2건

- 1구간 일부구간 작업시간 변경 등

- 1구간 시점부 400/100mm 부단수 분기 추가시공 등

- 신규공정 및 신규자재 발생으로 인한 물량 증·감

- 건강, 연금, 노인장기요양 보험료, 퇴직공제부금 및 부지임대료 정산

- 주요 공종 수량 증,감 현황

공 종	단 위	당 초	변 경	증 ․ 감
**************	*	***	***	******
**************	*	*	**	******
**********	**	*	**	******
**********	**	*	*	******
****	*	***	***	******

- 공사비 증,감 현황

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
****	***********	***********	*************
******	**********	***********	*************
*****	***********	***********	*************

□ 조치의견

○ 본 공사는 설계변경 심사 대상에서 제외되므로 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 설계변경의 적정성 및 신규공종 단가적용, 물량 증감 등을 검토하며,

※ 설계변경 심사대상 : 도급비 10% 이상 증가 시(재무회계과-563,‘13.1.15)

○ 설계변경 심의위원회에서 의결한 내용을 토대로 변경계약 및 정산시행에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 : 설계변경 내역서 1부. 끝.