투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(도로관리과장)
(경유)
제목	가산2빗물펌프장 유수지복개(차고지) 기본 및 실시설계용역 기간 연장통보

1. 우리본부에서 시행중인 가산2빗물펌프장 유수지복개(차고지)기본 및

실시설계용역과 관련하여 용역기간을 아래와 같이 변경하였음을 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

용 역 명	용 역 기 간		비고
	변 경 전	변 경 후
가산2빗물펌프장 유수지복개 (차고지)기본 및 실시설계용역	2014.12.29.~2015.12.28	2014.12.29.~2016.6.30

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김학지		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	12/17 임춘근
협조자
시행	방재시설부-17119	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌등 14층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개