문서번호	방재시설부-17139
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	방재시설부장
고소영	김인숙	12/17 임춘근

『경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계구간) 1차분』

용역기간 변경 실정보고 검토보고

2015.12.

방재시설부

(공원시설과)

『경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계구간) 1차분』

용역기간 변경 실정보고 검토

「경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계구간, 전면책임)  계약사로부터 용역 공정계획 변경에 따른 용역기간 변경(1차분 완수일자 변경)에 대한 실정보고 검토임

▶ 관련근거 : PSC-2015-764(2015.12.16.)호

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)(전면책임)

○ 과업위치 : 경춘선 폐선부지 공원조성 2,3단계 구간, 경춘철교정비

- 2단계 : 경춘철교~산업대3길 고가철교(L=1.1㎞)

- 3단계 : 육사삼거리~서울시계, 광운대역 주변(L=3.0㎞)

- 경춘철교 정비 L=176.5m

○ 내    용 : 공원조성(조경/토목/건축/전기/통신/폐기물처리용역 등) 건설사업관리

○ 용역기간 : 2015.04.13.~2017.6.10.(1차분 2015.12.31.)

○ 용 역 비 : 1,188,900천원(1차분 763,924천원)

○ 용 역 사 : ㈜선진엔지니어링, ㈜수성엔지니어링, ㈜진전기엔지니어링

□ 실정보고 내용

○ 건설사업관리용역 용역기간 변경(1차분 완수일자 변경)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	2015.04.13.~2017.06.10	변경없음
1 차분	2015.04.13.~2015.12.31.	2015.04.13.~2016.07.31.	(증 213일)

□ 실정보고 사유

○ 경춘철교 정비공사의 2015년 10월 15일 재착공에 따라 용역

공정계획에 변경 사유 발생

○ 경춘철교 정비공사, 경춘선 폐선부지 공원조성 공사(2단계) 및

3단계 공원조성 사업(설계단계 포함)의 원활한 용역수행을 위하여     건설사업관리기술자 배치조정 등 용역계획 기 변경함.

[방재시설부-15351(2015.11.16.)]

○ 용역계약일반조건 제16조(과업내용의 변경)에 의거 용역공정계획

변경에 따라 1차분 완수일자 변경 필요

□ 보고자 의견

○『경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)』의 용역 공정계획 변경에 의하여 용역기간 변경되는 사항으로 실정보고 승인하고, 향후 설계변경 시 반영하도록 감리단에 통보하고자 함.

붙  임  감리단 실정보고서 1부.  끝.