함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰-1차최종(2015년 월곡대배수지등 18개소 항청소 용역-단가계약)

1. 우리사업소에서 시행중인『2015년 월곡대배수지등 18개소 항청소 용역(단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차 최종)을 시행하고 계약의뢰 합니다.

가. 용 역 명 : 2015년 월곡대배수지등 18개소 항청소 용역(단가계약)

나. 도 급 자 : **************

다. 용역기간 : 2015년 4월 15일~2015년 12월 31일

라. 설계변경내용 : 제경비(보험료) 감액 및 품질시험 의뢰비용 추가

마. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,기타교체비(배수지항청소)

라. 설계변경 내역                                              (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증.감
도급비(VAT포함)	140,479,530	130,186,000	감) 10,293,530

붙임 : 1. 내부품의서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이연한		주무관	유명수		시설관리과장	12/17 나태산
협조자
시행	시설관리과-38151	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2205	/전송	02-3146-2239	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	부분공개(6)