투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계변경(2차) 계약의뢰(2015년 폐아스콘 운반 및 처리용역-1구역)

우리사업소에서 시행중인 『2015년 폐아스콘 운반 및 처리용역(1구역)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차 최종)을 실시하고 계약(변경)을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2015년 폐아스콘 운반 및 처리용역(1구역)

나. 용역기간 : 2015.04 .08 ~ 2015. 12. 31.(변경없음)

다. 계약금액 : 277,552,000원

라. 도 급 자 : (유)도성개발 대표 윤칠중

마. 설계변경사유

- 폐기물 발생물량 변경

‧ 노후포장도로(1구역) 당초 계획물량 감소

‧ 도로손상부분 긴급복구공사 당초 계획물량 감소

바. 설계변경내역

- 공사비 변경                                         (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총용역비	277,552,000	268,026,000	감)9,526,000
도 급 비	277,552,000	268,026,000	감)9,526,000

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비

[품의번호 : 23]

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 시행 방침 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),관리단속과장
주무관	김용면		도로보수과장	12/17 국중진
협조자
시행	도로보수과-5739	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2210-1566	/전송	02)2210-1549	/		/	대시민공개