투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(제5차) 시행[2015년 교통안전시설 유지보수 공사(안전표지)]

1. 기전과-12762호(2015.12.18)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진중인『2015년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가)』에 대해 설계변경(제5차)코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2015. 03. 30 ~ 2015. 12. 31

다. 시공업체 : *************

라. 공사금액 : 금67,444,000원

마. 설계변경 내용

○설계변경 금액

(단위:원)

구 분	변경 전	변경 후	증 감		비 고
총 공 사 비	67,444,000	64,634,000	- 2,810,000	(감)
공 급 가 액	61,312,727	58,758,182	- 2,554,545	(감)
부가가치세	6,131,273	5,875,818	- 255,455	(감)

○설계변경사유 : 당초 작업 예정물량을 산출하여 사업을 추진하는 연간단가 특성상 작업지시에 따른 물량의 증․감 발생에 따른 계약금액변경

바. 예산과목 : 도시교통체계및소통개선,교통안전시설물관리,교통사업특별회계,교통안전표지설치및개선,시설비(401-01)(62,000,000원)

도시교통체계및소통개선,교통소통및안전관리강화,교통사고잦은곳개선,시설비(401-01)(4,912,000원)(감2,544,000원)

도시교통체계및소통개선,교통소통및안전관리강화,교통사망사고줄이기사업,시설비(401-01)(532,000원)(감266,000원)

붙임 : 1. 설계변경(제5회) 방침서 1부.

2. 감리사 설계변경 문서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	강운규		기전과장	12/17 이영목
협조자	관리단속과장	정수현
시행	기전과-12766	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동,북부도로사업소)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	944-5477	/전송	945-5074	/	wgkang@seoul.go.kr	/	부분공개