문서번호	급수운영과-33913
결재일자	2015.12.17.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박종대		김광운	12/17 최명익
협조

설계변경(2차) 심의 위원회 개최 결과보고

[2015년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

동부수도사업소

(급수운영과)

설계변경(2차) 심의 위원회 개최 결과보고

2015년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)

우리사업소에서 시행중인『2015년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)』에 대한 설계변경(2차) 사전 심의 위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1				공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 : 도로포장 376a(아스팔트 339a, 콘크리트 8a, 보도 29a)

다. 계 약 자 : ㈜승건건설 대표 김주택

라. 공사기간 : 2015.06.15. ~ 2016.05.31.

마. 계약금액 변경내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증·감	비 고
총부기금액	*************	*************	****
1차수 금액	*************	*************	************	2015.06.15~2015.12.31
2차수 금액	*************	************	************	2016.01.01~2016.05.31

2				심의 위원회 개최사항

가. 개최일자 : 2015. 12. 17.(목) 10:00

나. 개최장소 : 3층 회의실

다. 참석위원 : 급수운영과장 외 6명

라. 검토내용

- 신규공종 및 시공물량 증·감에 따른 설계변경 적정성 검토

마. 검토결과 : 위 검토내용에 대하여 적정하다는 심의의견을 제시함.

3				향후계획

가. 위와 같이 설계변경 심의 위원회 개최결과 심의위원 모두 설계변경이적정하다고 의견을 제시하였으므로, 이를 설계변경 내역에 반영하여 본청 재무과에 변경계약 의뢰하고자 합니다.

붙 임 : 1) 설계변경 심의 의뢰서 1부.

2) 설계변경 사전심의 의결서 1부.

3) 설계변경 내역서 1부. 끝.