투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(철근) 납품기한 연장 요청 (서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사)

「서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사」관급자재(철근) 납품기한을 아래와 같은 사유로 연장코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 물 품 명 : 철근

나. 계 약 자 : 현대제철(주)

다. 납품기한 변경사항

납품요구번호	규 격	수 량(톤)	납품기한		비고
			변경전	변경후
12-15-1-41471-00	철근콘크리트용봉강, 이형봉강HD10	117.116	‘15. 12. 31.	‘16. 1. 30.
	철근콘크리트용봉강, 이형봉강HD13	298.587

라. 사   유 : 지하층 폐기물 물량증가 처리로 인한 공정 지연에    따른 공정조정으로 계획물량 미소진되어 연장 필요

마. 귀책사유 : 도시기반시설본부(지체상금 미부과).    끝.

	건축부장
주무관	정재흥		의료시설과장	代정재흥		건축부장	12/17 안재혁
협조자
시행	건축부-14530	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미엄 플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2616	/전송	02)3708-2659	/	jjh5160@seoul.go.kr	/	대시민공개