문서번호	교량안전과-7195
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	기술점검팀장	교량안전과장
유현선	최진우	12/17 이용심

용역 설계변경(최종, 정산) 검토 보고

(마포대교 하류교 정밀안전진단 및 상류교 정밀점검 용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

안전총괄본부

(교량안전과)

용역 설계변경(최종, 정산) 검토 보고

- 마포대교 하류교 정밀안전진단 및 상류교 정밀점검 용역 -

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 마포대교 하류교 정밀안전진단 및 상류교 정밀점검 용역

○ 용역기간 : 2015.6.16. ~ 2016.1.11

○ 용 역 비 : 265백만원

○ 계 약 자 : 케이에스엠기술(주)외 1개사

Ⅱ		보 고 내 용

○ 설계변경 사유

- 자문회의 개최 후 자문수당 지급후 남은 자문비용 정산

○ 설계변경 내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총 용 역 비	265,000	264,700	감) 300
공 급 가 액	240,364	240,364	-
부가가치세	24,036	24,036	-
자문회의비	600	300	감) 300	자문비 실정산

Ⅲ		조 치 의 견

○ 위와 같은 사안에 대하여 설계변경 시행코자 함.

붙 임 : 설계변경 요청 공문 및 내역서(정산) 1부.  끝.