투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(서초역~방배로간 도로개설공사)

우리부에서 추진중에 있는 「서초역~방배로간 도로개설공사」 의 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서초역~방배로간 도로개설공사

나. 도 급 비 : 44,158백만원(1차 계약금 3,822백만원원)

다. 공사기간 : 2015.10.20 ~ 2019. 1.31(1차 계약기간 2015.10.20 ~ 2015.12.18)

라. 도 급 사 : 롯데건설(주)

마. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 서초역~방배로간 도로확장, 시설비

바. 준공기한 연기 (※계약금액 변경 없음)

1) 총 차 : 당초 ′15.10.20 ~ ′19. 1.31(변경없음)

2) 1차분 : 당초 ′15.10.20 ~ ′15.12.18 → ′15.10.20 ~ ′16.10.19(305일 연장)

사. 연기사유 : 붙임 참조

붙임 : 1. 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	방재시설부장
★주무관	조동협		치수시설과장	代이병환		방재시설부장	12/17 임춘근
협조자	경리과장	박환
시행	방재시설부-17171	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 14층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/	yerom@seoul.go.kr	/	대시민공개