문서번호	토목부-27263
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		代장종환	12/17 노우성
협조
	주무관		장종환

건설폐기물(소각, 혼합) 설계변경(전체3회, 3차1회)

【강남순환도시고속도로 8공구 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12

도시기반시설본부

토목부

건설폐기물(소각, 혼합) 설계변경(전체3회, 3차1회)

【강남순환도시고속도로 8공구 건설공사】

「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제15조제1항 및 시행령 제11조」에 의거 분리 발주하여 시행중인 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 건설폐기물 처리용역에 대한 설계변경 사유가 발생하여 검토 보고 드림

※ 관련근거 : 동기공 2015-4663호(2015.12.11.)

용역 개요

❍ 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(8공구)건설공사 건설폐기물(소각,혼합)처리용역

❍ 용역규모 : 소각폐기물 680톤, 혼합폐기물 645톤

❍ 용역기간 : `12.04.05.~`16.05.30.(3차 `15.03.01.~`15.12.31.)

❍ 용역금액 : 금132,993천원 (3차: 금60,000천원)

❍ 계 약 자 : ㈜진흥중공업  대표 박찬양

폐기물 처리량 및 용역비 현황

구 분	예 산 (천원)	수 량(TON)			비 고
		소각폐기물	혼합폐기물	계
총 괄	132,993	680	645	1,325
1차 (기 준공)	64,000	267.92	481	748.92
2차 (기 준공)	4,000	17	29.4	46.4
3차 (금 회)	60,000	395.08	37.6	432.68
장 래	4,993	-	97	97

설계변경 내용

❍ 물량 변경 현황

(단위: 톤)

구 분		소각폐기물	혼합폐기물	비 고
전체	당 초	680	645
	변 경	1,158	743
	증･감	증) 478	증) 98
3차 (1회)	당 초	395.08	37.6
	변 경	535.65	211.15
	증･감	증) 140.57	증) 173.55

❍ 용역비 변경 현황

구 분		용역비	착공일	준공예정일	비 고
전체	당 초	132,993,000	2012. 4. 5.	2016. 5.30.
	변 경	208,290,000	2012. 4. 5.	2016. 5. 30.
	증･감	증) 75,297,000		변경없음
3차 (1회)	당 초	60,000,000	2015. 3. 1.	2015.12.31.
	변 경	89,563,000	2015. 3. 1.	2015.12.31.
	증･감	증) 29,563,000		변경없음

❍ 설계변경 사유

- 과천시 구간 보상물건 철거물량 증가에 따른 건설폐기물(소각, 혼합) 수량 정산

조치계획

❍ 위 보고내용과 같이 설계변경 시행하여 용역추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 감리 검토의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.