문서번호	교량안전과-7249
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	기술점검팀장	교량안전과장
유현선	최진우	12/17 이용심

1종 교량 보수·보강공사 감독권한 대행 등 건설사업관리 용역 설계변경(최종, 정산)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

1종 교량 보수·보강공사

감독권한 대행 등 건설사업관리 용역 설계변경(최종, 정산)

‘15년 『1종 교량 보수·보강공사 감독권한 대행 등 건설사업관리 용역』을 수행하고 있는 한국건설관리공사로부터 설계변경원이 제출되어 이에 대한  검토 보고 드림

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 1종 교량 보수·보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역

○ 기    간 : 2015. 6. 16 ~ 2015.12.30. (6.5개월)

○ 용 역 비 : 747백만원

○ 용 역 사 : ㈜한국건설관리공사(70%),  ㈜우빈기술공사(30%)

Ⅱ		추진경위

○ ‘15. 6. 16 : 용역착수

○ ‘15.12.  1 : 변경계약(1차)

- 준공기간 조정, 중급기술자 2인 추가투입, 업무용차량 2대 추가투입, 야간근무대가반영

○ ‘15.12. 17 : 변경계약 요청(용역사→본부)

- 공사 준공일정과 회계연도 예산집행 계획에 따라 아래 주요내용과 같이 용역기간 조정, 주요공사에 대한 감리원 투입조정과 야간공사 대가 실정산 등을 반영

Ⅲ		설계변경 요청 내용

□ 관련근거 : 교량안전과-6116호(‘15.12.3)

□ 설계변경 사유

- 건설사업관리용역 대상공사의 공정에 따른 감리원 투입조정과 야간공사 대가 실정산 등 반영에 따른 설계변경

□  주요 설계변경 반영내용

구 분		당 초	변 경	증. 감	비 고
1.용역기간 조정		‘15.6.16~’15.12.30	‘15.6.16~’15.12.22	감(0.2개월)	공사완료에 용역기간 조정
2.감리원 투입조정	토목	‘15.7.1~’15.12.22	‘15.7.16~’15.12.15	감(0.5개월)	해당공사 준공
	도장	‘15.8.10~’15.12.9	‘15.8.10~’15.12.22	증(0.4개월)	도장공사 관리
4.야간근무 대가		8.983인·월	8.495인·월	감(0.488인·월)
5.직접경비(차량비 ,현지사무원 등)		‘15.6.16~’15.12.30	‘15.6.16~’15.12.22	감(8일)	투입기간 조정

□ 건설사업관리 용역비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증. 감	비 고
1. 직접인건비	278,092	270,547	감7,545
2. 제경비, 기술료 포함	371,465	360,849	감10,616
3. 야간대가	24,198	22,891	감1,306
4. 손해배상공제료	5,700	5,530	감170
5. 부 가 세	67,945	65,981	감1,963
6. 도 급 비	747,400	725,800	감21,600

Ⅳ		조치계획

○ 상기 건설사업관리의 용역사 요청 내용과 설계변경 및 정산하고 준공계 제출시 검토후 준공처리 하고자함.

○ 감리 예산 현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	품의액	당 초	변 경	증. 감
1. 한강일상유지	770,000	770,000	709,049	687,449	감21,600
2. 도로시설물 (교량)일상유지	154,000	44,946	38,351	38,351	-
감 리 비	924,000	814,946	747,400	725,800	감21,600

Ⅴ		향후계획

○ ‘15.12.22  : 용역 준공

붙임 1. 설계변경 요청 공문 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부. 끝.