문서번호	문화정책과-8252
결재일자	2015.12.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		문화사업팀장	문화정책과장
이덕노		김명중	12/17 박대우
협 조

서울 거리예술창작센터 염소투입실 바닥공사 발주

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  12

문 화 본 부

(문화정책과)

거리예술창작센터 염소투입실 바닥 공사

서울 거리예술창작센터 염소투입실 바닥이 고르지 못해 목공,철근제작에 쓰이는 기계설비 설치에 어려움이 있어 바닥공사를 실시하고

염소투입실 입구로 빗물이 쓰며들어 트렌치를 설치하여 목공,철골제작에 불편함이 없도록 하고자 함.

Ⅰ		설치 목적

○ 염소투입실 바닥이 고르지 못해 목공,철근제작에 쓰이는

기계설치에 어려움이 있어 바닥을 수평모르타르 위 투명

에폭시공사를 하여 목공,철골제작에 불편함이 없도록 하고

○ 빗물이 염소투입실 안으로 쓰며들어 건물입구에 트렌치를

설치 건물의 효율성을 높이고자 함.

Ⅱ		공사 개요

○ 공 사 명 : 서울 거리예술창작센터 염소투입실 바닥공사

○ 위     치 : 서울 거리예술창작센터 염소투입실  〔첨부1〕현황사진

○ 공사 개요                                      〔첨부2〕건축도면

- 바닥공사 : 199.55㎡ (59평)

- 시공방법 :  기존바탕면 처리후 아스팔트 프라이머 +

수평모르타르(5~15mm) + 투명에폭시(3mm) 마감

- 트렌치 설치 : 무소음 트렌치 설치 (7m×30cm×4.5cm)

○ 공사 금액 : 일천사백오십팔만칠천원 (₩14,587,000원) ※ 부가세포함

○ 공사 기간 : 2015. 12. 26 ~  ‘16. 1. 26 (1개월)

Ⅲ		소요 예산

○ 예산과목 : 문화정책과, 문화도시 서울 구현, 문화시설운영지원, 서울 거리예술창작센터 운영, 시설비(401-01)

○ 공 사 비 : 14,587,000원               〔첨부3〕공사비 견적서

- 제 료 비 : 4,304,300 원

- 노 무 비 : 6,494,900 원

- 필요경비 : 1,214,000 원

- 일반관리비 및 이윤 : 1,248,000 원

- 부 가 세 : 공급가액 10%

Ⅳ		공사발주계획

○ 공사업체 : ㈜ 예 디자인 (대표 : 서두억)

- 주      소  : 구로구 디지털로 32가길 25, 201호

- 사업의 종류  : 건설업 및 제조업, 건축자재

○ 계약방법 : 수의계약 (관련근거: 지방자치단체를대상으로하는  계약에관한법률 제9조 및 시행령 제25조제1항 제5호)

○ 하자보증기간

- 지방계약법 시행규칙 제68조 [별표1](공사의 종류별 하자담보책임기간)에 의함

Ⅴ		향후 계획

○ ‘15. 12. 18 : 계약의뢰

○ ‘15. 12. 26 ~  ’16. 1. 26 : 공사실시 (1개월)

첨 부  1) 현장사진 1부

2) 건축도면 1부.

3) 공사비 견적서  1부. 끝.