준공기한 연기 보고

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이혜진	송종범	12/17 代송종범

	명에 의거 담당 구역내 급수공사를 시행중 준공기한 연기 사항이 있어 보고합니다.
2015. 12. 17.
보 고 자 : 직 성명 : 지방시설서기 이 혜 진

보       고       내       용

건    명

준공기한 연기 보고(신설-238, 둔촌동 110-1)

내용

1. 위   치 : *************

2. 작업지시 번호 : 신설-238

3. 급수공사 종별 : 신설

4. 보고내용

작업 지시	위 치	수요가 연기사유	당 초	1차 변경
신설 238	둔촌동 110-1	수요가의 요청으로 급수공사 연기접수됨 (내부설비공사 지연)	2015. 12. 3. ~2015. 12. 18.	2015. 12. 3. ~2015. 12. 30.

5. 조치의견

- 상기 위치의 급수공사 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자합니다.

6. 지체상환금 부과여부 : 미부과

비  고