서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	여객자동차운송사업개선명령(6613번, 6616번 임시우회 기간 연장) 통보

1. 버스정책과-16359(2015.9.18.), 구로구 공원녹지과-20099(2015.12.15.)호 관련입니다.

2. 위 호 관련, 구로구 궁동생태공원 3차 조성공사의 기간 연장에 따라 임시우회기간 연장을 여객자동차운수사업법 제23조에 따라 개선명령을 아래와 같이 통보합니다.

3. 해당 버스회사 및 관련 기관(부서)에서는 소관업무에 조치 및 시민 불편이 최소화되도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사 변경사항

○ 공 사 명 : 구로구 궁동생태공원 3차 조성공사

○ 공사기간 연장 : 2015.5.18. ~ 2016.12.31

- 당 초 : 2015.5.18. ~ 12.30

- 변 경 : 2015.5.18. ~ 2016.12.31

○ 변경사유 : 궁동 어린이도서관 건립 공사 추가 등으로 공기연장

나. 개선명령 : 6613번, 6616번 등 2개 노선 임시우회 및 무정차 기간 연장

○ 우회기간 : 2015.7.13. ~ 2016.12.31

- 당 초 : 2015.7.13. ~ 12.30

- 변 경 : 2015.7.13. ~ 2016.12.31

※ 우회기간외 우회 구간, 임시 정류소 등은 전과 동일

다. 유관기관(부서) 조치(협조)사항 : 임시우회 안내 등

○ 시민봉사담당관 : 120 전화 안내 및 응대

○ 교통정보센터 : TOPIS 공지사항 게시

○ 자 치 구 : 대시민 홍보 및 안내

○ 운송업체 : 안내문 부착 등 대시민 홍보

- 차량 내부, 무정차 정류소 및 임시 정차 정류소에 임시우회운행 안내문 부착

○ 한국스마트카드 : 차량장착 단말기 입력 등 운행정보 확보 등.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	시민봉사담당관,교통정보과장,구로구청장(교통행정과장),구로구청장(공원녹지과장),한국스마트카드,세풍운수
주무관	이만호		노선팀장	김홍진		버스정책과장	12/17 이상훈
협조자
시행	버스정책과-22089	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 서울시청 서소문청사 제1별관 7층 버스정책과	/
전화	02-2133-2285	/전송	02-2133-1049	/	lmh25@seoul.go.kr	/	대시민공개