문서번호	토목부-27312
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
이석근		이승우	12/17 노우성
협조

준공기한 연기보고

[성산대교 성능개선사업 건설사업관리(설계감리)용역]

2015.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

준 공 기 한   연 기 보 고

[성산대교 성능개선사업 건설사업관리(설계감리)용역]

용역개요

○ 용역명 : 성산대교 성능개선사업 건설사업관리(설계감리)용역

○ 위  치 : 서울시 마포구 망원동 ~ 영등포구 양평동(성산대교)

○ 규  모 : 폭 27~39.2m,  연장 1,455m(본교 및 접속교)

․ 성능개선(슬래브 전면교체 48,000㎡

․ 구조안전성 검토

○ 기  간 : 2014.12.18. ~ 2015.12.31.

○ 용역비 : 214,957,000원(계약)

○ 용역사 : ㈜유신   대표  성낙일

용역기한 연기

구 분	당 초	변 경
용역기간	2014.12.18.~2015.12.31.	2014.12.18.~2016. 3.31.
도 급 비	214,957,000원	변경없음

연기에 따른 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

지체상금 : 미부과

연기사유

○ 설계감리중인 「성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계」용역이 본교

및 남북단 접속교 도장공법선정 및 설계VE, 디자인심의, 설계심의 등의

행정절차 이행이 지연되어 설계용역의 준공기한 연기요청에 따라 이와

연계하여 준공기한 연기가 불가피함.

조치의견

○ 위 사유로 인하여 성산대교 성능개선사업 건설사업관리(설계감리)

용역을 연기조치하여 업무추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1)준공기한 연기의뢰서 1부.

2)공문서 사본(예정공정표,합의각서 포함) 1부.  끝.