문서번호	토목부-27310
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		代강철규	12/17 노우성
협조

시선유도봉 등 설치

(서울역 주변 교차로 개선공사)

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

시선유도봉 등 설치

(서울역 주변 교차로 개선공사)

서부도로사업소 요청에 따라 숙대입구 교차로 주변 시선유도봉 및 무단횡단 방지를 위한 휀스 설치 등에 따른 검토보고임

Ⅰ		관련근거

○ 유호(서울역)제15-33,36호(2015.12.17.) 실정보고

○ 서부도로사업소 시설보수과-10804(2015.12.10.) 공사관련 협조요청

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 서울역 주변 5개소 교차로

○ 규    모 : 교차로 개선 4개소, 삼거리 신설 1개소

- 서울역교차로, 중림동교차로, 염천교교차로, 숙대입구교차로, 숭례문삼거리(신설)

○ 공사기간 : 2015. 8. 7.∼ 2015.12.31.

○ 도 급 비 : 1,385백만원

○ 시 공 사 : 유호산업개발㈜

Ⅲ		보고내용

□ 시선유도봉 설치 등

➀ 보고사유

- 서부도로사업소 요청에 따라 숙대입구 교차로 주변 시선유도봉 및 무단횡단 방지를 위한 휀스 설치 등을 설치하였음

▷ 시선유도봉 설치수량

·당초 (-) → 변경 (40개소)

▷ 무단횡단 방지 휀스 설치수량

·당초 (-) → 변경 (88m)

▷ 보차도경계석 설치 및 안전도색

·당초 (-) → 변경 (75m), 도색(15㎡)

- 숙대입구 교차로 차로 확장구간 터파기 결과, 건설폐기물이 혼재되어 있어 일반토사로 반출이 불가함에 따라 건설폐기물로 처리.

➁ 위치도

➂ 수량 증·감 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
1. 숙대입구 교차로
그래픽 노면표시	경계석도색	㎡	-	15	15
시선유도봉 설치	∅80*760㎜	개	-	40	40
보차도경계석 설치	200*250* 1000㎜	m	-	75	75
휀스설치	2000*1000	m	-	88	88
잔토처리	B.H.(0.4)	㎥	334	-	334
폐콘크리트 운반	B.H.(0.4)	㎥	18	352	334
폐기물 상차		㎥	65	399	334

➃ 공사비 증·감 현황                             (단위 : 원)

구 분	금 액		증·감	비고
	당 초	변 경
직접공사비	5,429,757	35,066,138	29,636,381
간접공사비	1,640,243	8,553,862	6,913,619
공급가액	7,070,000	43,620,000	36,550,000
부가가치세	707,000	4,362,000	3,655,000
도급비	7,777,000	47,982,000	40,205,000

- 단가적용 : 기계약단가 및 낙찰율 86.89% 적용

Ⅳ		조치계획

○ 서부도로사업소 요청에 따라 숙대입구 교차로 주변에 시선유도봉 및 무단횡단 방지를 위한 휀스 설치 등은 적정한 것으로 판단되어 우선 변경·설치하였으며 추후 설계변경시 반영 조치하고자 함.

붙  임 : 시공사 실정보고 2부.  끝.