문서번호	도시철도설비부-12902
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
오금석	황영일	12/17 정찬웅

우이~신설선

검수설비 공장검수 출장결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12. 16.

도시철도 설비부

우이~신설선 검수설비 공장검수 출장결과 보고

우이~신설선 차량기지내에 설치하여 전동차 차체 및 대차 수리에 사용하는 동시인양장치 및 턴테이블에 대한 공장검수를 실시하고 보고함

□ 개  요

- 제작내역

품 명	구 분	제 원	비고
동시 인양 장치	용량	72톤(12톤×2조×3대)
	인상높이	1,600mm
	인상속도	4개(2개 × 2열)
	트렉게이지	1,435mm
	주전원	3Φ, AC 380V, 60Hz
회전 테이블	용 량	회전하중 10톤, 통과하중 20톤
	턴테이블 크기	Φ3,400mm
	회전각도	정·역회전 360°
	주전원	3Φ, AC 380V, 60Hz

- 제 작 사 : 금천시스템㈜(충남 당진시 신평면)

- 검수일시 : 2015.12.16(수) 09:20 ~ 17:30

- 검 수 자 : 도시기반시설본부(오금석), 감리단(명현중), 시공사(김진호)

□ 지적사항 및 조치계획

- 조작반 높이 부적합 → 조작반 발판 추가제작 설치

- 조작반 케비넷내 전등 및 히터 미설치 → 추가설치

□ 향후계획

: 해당 차체세척기에 대한 공장검수 결과 제작사양에 맞게 제작된 바, 지적사항 조치후 아래 일정에 따라 차량기지에 반입하여 설치예정임.

- 2015.12.28 : 지적사항 보완완료

- 2015.12.26 : 우이동 차량기지내 반입

- 2016.02.19 : 차량기지내 현장 설치 완료

- 2016.02.22 : 시운전 실시

따로붙임 : 동시인양장치 및 턴테이블 검수 사진 1부.   끝.