투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 요청[2015년 청량1고가 성능개선 교통신호기공사-성동]

1. 기전과-8969호(2015.12.16.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『2015년 청량1고가 성능개선 교통신호기공사-성동』에 대하여 변경계약(준공기한 연기) 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 청량1고가 성능개선 교통신호기공사-성동

나. 계 약 자 : ㈜청록개발 대표 배한철

다. 공사기간 : 2015.07.31.~2015.12.31

라. 계약금액 : 137,610,000원

마. 연기사유 : 선행공정 토목공사 지연으로 공사시기 미도래

바. 공사기간 연기

구분	공사기간		비고
	변경전	변경후
공사기간	2015.07.31.~2015.12.31	2015.07.31.~2016.06.30	공사금액 변경없음

사. 연기귀책사유 : 서울특별시 성동도로사업소

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

자. 예산과목

: 도시안전본부 교량안전과, 교량관리, 고가차도 및 입체교차로관리,                 청량1고가 성능개선, 시설비

붙  임 : 1. 준공기한 연장 검토보고 및 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	차준원		기전과장	12/17 최주용
협조자	주무관	이명호
시행	기전과-8992	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개