문서번호	도시철도토목부-16052
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
김승조		김정수	12/17 김진팔
협조
	주무관		김소연

『9호선 3단계 920공구 폐기물처리용역』

폐기물량 발생 시기 변경에 따른 용역기간 조정 검토 보고

2015. 12

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『서울지하철 9호선 3단계 920공구 폐기물처리용역』

폐기물량 발생시기 변경에 따른 용역기간 조정 검토 보고

「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제15조제1항 및 시행령 제11조」에 의하여 분리 발주하여 시행중인 지하철 9호선 3단계 920공구 폐기물 처리용역에 대한 설계변경 사유가 발생함에 따라 처리방안을 검토하여 보고드림

1. 용역개요

○ 용역명 : 9호선 3단계 920공구 건설공사 폐기물처리용역

○ 계약자 : ㈜한진산업 대표 김상현

○ 계약금액 : 금709,446천원

○ 용역기간 : 총괄 2010.08.27.～2016.02.17

5차 : 2015.04 ～2015.12.31

2. 폐기물 발생(처리)량 및 용역비 현황

구 분		계약금액	계약일	용역기간	비고
전 체		709,446	'10.08.26	'10.08.27~'16.02.17
1차		90,000	'10.08.26	'10.08.27~'11.12.20	준공
2차		150,000	'12.03.15	'12.03.15~'13.01.21	준공
3차		133,000	'13.05.24	'13.05.27~'14.02.20	준공
4차		13,000	'14.02.25	'14.02.25~'15.01.31	준공
5차 (진행중)	당초	200,000	'15.04.13	'15.04.13~'15.12.31	진행중
	변경	200,000		'15.04.13~'16.02.17	진행중
장 래		123,446	-	-

○차수별 폐기물 발생량

○용역비 현황(5차 1회)

구분	단위	단 가	설계금액		기성금액		잔여금액		비 고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
폐아스콘	ton	14,741	2,438	35,930	1,127.58	16,622	1,974.4	19,308	단수 조정
폐콘크리트	ton	16,414	8,888	145,888	4,472.89	78,342	4,408.7	67,546
계				181,818		94,964		86,854
VAT				18,182		9,496		8,686
용역비				200,000		104,460		95,540

3. 용역기간 변경 사유

○ 터널2구간 커터교환을 위한 지상그라우팅 공법의 변경에 따라 폐콘리트 수량 감소

(RJP공법 시공 후 굴진 → 굴진 중 커터교환시 CSS공법,슬라임 처리)

○ 934정거장 출입구 2차가시설 설치 시 공정지연에 따라 아스콘물량 감소

4. 책임감리원 검토의견

○ 건설폐기물 처리용역(5차)은  2015년 4월 13일 착수하여 2015년 12월 31일 준공 예정이나, 현재까지 처리수량을 검토한 결과, 폐콘크리트의 실 처리 수량이 당초 커터교환을 위한 그라우팅 공법 변경으로 감소하였으며, 폐아스콘 물량은 934정거장 출입구 2차가시설 공정지연에 따라 발주 당시 계획했던 수량을 소화하기 곤란한 실정이므로,

○ 건설폐기물처리 용역 계약기간을 2015년 12월 31일에서 총괄용역 준공기한인 2016년 2월 17일까지 우선 연장하고,

○ 9호선 3단계 총사업기간 변경 결과에 따라 재검토하여 용역기간 및 계약수량을 변경계약을 하는 것이 타당함

5. 조치계획

○ 폐콘크리트, 폐아스콘 물량 미도래로 인한 계약기간 연장에 대한 감리단 의견은 타당하며,

○ 현재 진행중인 건설폐기물 처리용역(5차) 용역기간은 당초 7차공사 계획공정(5월)에 따른 조정과 지하철 9호선 3단계 건설공사의 총괄계약 기간, 7차공사 계약기간 연장을 감안하여 용역기간 연장함이 타당함

○ 폐기물처리용역 변경내역

(단위:천원)

구분		당초	변경	증감
총괄	계약금액	709,446	709,446	변경없음
	공사기간	‘10.08.27～’16.02.17	‘10.08.27～’16.02.17	변경없음
5차	계약금액	200,000	200,000	변경없음
	공사기간	‘15.4.13～’15.12.31	‘15.4.13～’16.02.17	47일 연장

○ 폐기물 운반 처리계획

(단위 :천원)

구 분		설계 수량	폐기물 반출					비고
			기반출	2016년도			합계
				1월	2월	계
폐아스콘	본선환기구	1,026.0	-	513.0	513.0	1,026.0	1,026.0
	본선개착	-	-	-	-	-	-
	934정거장	1,142.0	1,127.58	14.42	-	14.42	1,142.0
	기타구간	270.0		135.0	135.0	270.0	270.0
	합 계	2,438	1,127.58	662.42	648	1,310.42	2,438
폐콘크리트	본선환기구	-	-	-	-	-	-
	본선개착	-	-	-	-	-	-
	934정거장	184.0	184.0	-	-	-	184.0
	기타구간	8,704.0	4,588.89	2,057.6	2,057.6	4,115.11	8,704.0
	합 계	8,888.0	4,772.89	2,057.6	2,057.6	4,115.11	8,888.00

붙임 : 1) 감리 검토의견서 1부.

2) 변경 설계내역서 1부.  끝.