문서번호	운영2과-380
결재일자	2014.1.28.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		운영2과장	데이터센터소장
전성권		김진하	01/28 이계헌
협조	주무관		박종순
	주무관		최창학

- 2014년 프론트오피스 -

정보자원 통합관련 의견수렴 결과 보고

2014. 01.

데이터센터

(운영2과)

- 2014년 프론트오피스 -

정보자원 통합관련 의견 수렴 결과 보고

2014년도 프론트오피스 자원통합(11개부서 11개사업)관련 해당사업 부서와 회의를 개최하고 그결과를 보고 드림.

Ⅰ

추진근거

❍ 『정보자원 통합 및 인프라 구축 개선 계획』 (단장님방침 : 운영1과-2569, 2008.8.11)

❍ 2014년도 정보화사업(신규분야) 예산타당성 심사결과 통보(정보기획담당관-4321, ‘13.9.12)

ⅡⅠ

추진방향

❍ 가상화 및 블레이드서버 구매를 통하여 필요시 시스템자원 구성, 재배치가 가능한 유연한 시스템 구축(필요시 자원 재할당)

❍ DBMS 및 백업 S/W, 스토리지 등 기존 시스템과의 호환성 확보를 통해 시스템의 안정성 확보

ⅢⅠ

사업개요

❍ 사업기간 : 2014. 5월 ~ 8월

❍ 사업내용 : 11개 부서 11개사업 자원통합

- 유닉스, 블레이드, 가상화서버(11식) : 서울일자리플러스센터 전산망 고도화(1), 3차원 실내공간 GIS 구축(1), 서울햇빛지도운영프로그램 및 데이터서버 구매(1), 에코마일리지서버 교체(2), 계약정보통합관리시스템(2), 물순환통합관리시스템(1), 서울시 발간자료 원문DB 구축(1), 서울대공원 웹서버 신규 교체(1), 메일서버 구매(1)

- 스토리지 증설(3식) : 서울일자리플러스센터 전산망 고도화(1), 교통안전시설물관리   시스템(1), 정보소통광장 홈페이지 유지관리 및 기능보완(1)

- 데이터베이스(3본) : 서울일자리플러스센터 전산망 고도화(라이선스 추가), 서울햇빛지도 운영프로그램 및 데이터서버 구매(MS_SQL), 물순환통합관리시스템(티베로)

❍ 사업예산 : 752백만원(사업부서 재배정 예산 포함)

ⅣⅢⅠ

추진사항

□ 1차 의견수렴(유선협의 포함)

❍ 기    간 : 2014. 1. 6(월) ~ 2014. 1.22(수)

❍ 협의내용 : 업무부서 요구사항 협의

□ 2차 의견수렴 및 협의 사항 :【세부사항 : 별첨#1】

❍ 일    자 : 2014. 1. 23(목)

❍ 장    소 : 데이터센터 4층 소회의실  14:00 ~ 15:30

❍ 참 석 자 : 총 19명

- 데이터센터(10명)

· 운영1과(박종순, 최창학, 송상봉)

⇒ 물순환통합관리시스템 구축(물관리정책과) : 운영1,2과 연계 사업

· 운영2과(전성권, 조윤홍, 조동찬, 최영헌, 박종호, 김재호, 조양수)

- 업무 담당자(9명)

· 공간정보담당관(유병인, 장인호) : 3차원 실내공간 GIS 구축

· 교통운영과(천주영) : 교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 구축

· 녹색에너지과(이균형) : 서울햇빛지도운영프로그램 및 데이터서버 구매

· 기후대기과(김태인) : 에코마일리지서버 교체 사업

· 물관리정책과(박현우) : 물순환통합관리시스템 구축

· 정보서비스과(김지혜, 이정수) : 서울시 발간자료 원문DB 구축

· 총무과(이형동) : 서울대공원 웹서버 신규 교체 사업

❍ 회의내용

- 2014년 프론트오피스 자원통합 방안 협의

- 서버(Web, WAS, DB 등)

· 하드웨어(H/W) : 유닉스, 가상화, 블레이드 서버 제공

· 운영체제(OS) : UNIX, Linux, Windows 2008 or 2012(64Bit)

- 스토리지(저장공간) : 내장 디스크 및 NAS 디스크 용량 할당

- 데이터베이스(DBMS) : 프론트오피스 통합 DB 사용(이중화)

※ 프론트오피스 자원통합 구축 사업에 따른 업무부서의 요구사항 수렴 및

사전 협의내용 재 확인(인사발령에 따른 4개 부서업무 담당자 변경)

- 데이터센터 및 사업부서 담당자 사업내용 및 규격 검토

2014년 프론트오피스 자원통합 방안 설명	사업부서별 시스템 규격 재 확인
사업부서별 세부 규격 등 내용검토(1)	사업부서별 세부 규격 등 내용검토(2)

ⅤⅣⅢⅠ

회의결과

❍ 물순환통합관리시스템 구축(물관리정책과)

- S/W구매 비용 관련 추가 협의 필요(WAS, DB서버 등) : 운영 1과

- 프론트오피스 웹서버 1식 구축(가상화 서버) : 운영2과

❍ 서울대공원 웹서버 사양 변경

- 가상화서버 → 블레이드서버로 변경 구축

※ 서울대공원 웹서비스 안정적 운영을 위해 블레이드 서버가 적정함

❍ 재배정 예산 일부 조정 협의 필요(물관리정책과)

· 물순환통합관리시스템의 구성 변경으로 서버 및 S/W(솔루션) 조정

❍ 기타 세부 사양조정 : 붙임 참조

ⅥⅤⅣⅢⅠ

추진일정

❍ 2014. 1 ~ 2 : 수요기관 의견수렴 및 환경조사

❍ 2014. 2 ~ 3 : 세부추진계획 수립 및 사업발주

❍ 2014. 4 ~ 5 : 제안서평가위원회 개최 및 계약체결

❍ 2014. 5 ~ 8 : 장비납품 및 시스템 구축

별첨 : 1. 2014년 정보자원 통합인프라 구축 사업 내역

2. 자원통합사업 회의 참석자 명단

【별첨#1】

‘14년 프론트오피스 자원통합 구축 사업 내역

◦ 사업별 업무부서 의견수렴(11개부서 11개 사업 자원통합)

연번	사 업 명	해당부서 (예산타당성 검토시 규격)	1차·2차 협의 내용
1	3차원 실내공간 GIS 구축	- 윈도우서버 2식(단독서버) (2.4Ghz * 2EA 16Core), 메모리(64GB), HDD 12TB(2TB * 6EA) RAID : 0,1, 1+0, 5+0, 6“	- 리눅스 서버 1식(단독서버) (CPU 6Core *2EA, 메모리 32GB, HDD 1TB * 6EA)
2	2014년 서울일자리플러스센터 전산망 고도화	- 유닉스 서버 1식 (CPU : 12Core 이상, M/M : 50GB 이상, HDD(300GB * 2EA 이상) - Oracle Database License 증설 (100 Named user 추가) - 스토리지 1식 (300GB * 18EA)	- 1안 : DB 서버 1식(유닉스 서버) (CPU : 12Core 이상, M/M : 50GB 이상, HDD(300GB * 2EA 이상) - 2안 : 기존 통합DB 파티션 증설 (이중화 구성) - 공통사항 · 스토리지 1식(300GB * 18EA) · 오라클 라이선스 증설
3	교통안전시설물관리시스템(T-GIS)	- 스토리지 1식 (HP P2000 G3 : 500GB)	- 통합 NAS 스토리지(500GB 추가 할당)
4	서울햇빛지도운영프로그램 및 데이터서버 구매	- GIS/DB서버 1식 - DBMS(MS_SQL) 1식	- GIS/DB 서버 1식(블레이드서버) (CPU : 6Core *2EA, 메모리 32GB, HDD 600GB 미러링 구성) - DBMS(MS_SQL) 1식
5	에코마일리지서버 교체	- 리눅스 서버 2식 - 스토리지(1TB) - RHEL(OS)	- WEB서버 2식(가상화서버) (CPU : 4Core, 메모리 8GB, HDD 50GB)
6	정보소통광장 홈페이지 유지관리 및 기능보완	- 스토리지 P2000G3 증설 (2TB * 24EA Physical 48TB)	- 기존 스토리지 증설 (2TB * 24EA Physical 48TB)
7	계약정보통합관리시스템	- WEB서버 1식	- WEB서버 1식(가상화서버) (CPU : 4Core, 메모리 8GB, HDD 50GB)
8	물순환통합관리시스템 구축	- 물관리시스템서버 1식	- WEB 서버 1식(가상화서버) (CPU : 4Core, 메모리 8GB, HDD 50GB) ※ 시스템 구성 변경으로 운영1과 협의 필요
9	서울시 발간자료 원문DB 구축	- 리눅스 서버 1식 - 스토리지(5TB)	- 리눅스 서버 1식(블레이드서버) (CPU : 6Core *2EA, 메모리 32GB, HDD 600GB 미러링 구성)
10	서울대공원 웹서버 신규교체	- WEB 서버 1식	- 리눅스 서버 1식(블레이드서버) (CPU : 6Core *2EA, 메모리 32GB, HDD 600GB 미러링 구성)
11	외부메일 스팸서버 구매	- 외부메일 스팸서버 1식	- 리눅스 서버 1식(블레이드서버) (CPU : 6Core *2EA, 메모리 32GB, HDD 600GB 미러링 구성)

【별첨#2】