문서번호	계약심사과-3877
결재일자	2016.3.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		심사총괄팀장	계약심사과장
김희경		박창석	03/04 김성규
협 조
	건축심사팀장			서홍일
	토목심사팀장			김종호
	주무관			임장경

「세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업」 설계경제성 심사 실행계획

2016. 3.

「세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업」

설계경제성 심사 실행계획

「세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업」에 대한 설계경제성 심사 전담팀을

구성하고, 설계경제성(VE) 심사 실행 계획을 수립하여 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ 설계경제성 심사제도 도입계획(행정1부시장방침 제29호, ’15.01.30)

□ 설계경제성 심사 확대 시행계획(행정1부시장방침 제45호, ’16.02.15)

Ⅱ		심사개요

□ 발주부서 : 공공재생과

□ 사  업  명 : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업

□ 사업개요

- 주 용 도 : 문화 및 집회시설 (전시장)

- 부지면적 : 1088.20m²

- 규    모 : 지하 3층, 지상 1층

□ 위    치 : 서울시 중구 태평로 1가 60-6, 정동 3-3, 3-6

□ 공 사 비 : 21,406백만원

□ 사업기간 : 2015년 2월 ~ 2017년 6월

□ 기본설계 공정률 : 95%

Ⅲ		심사계획

□ 주요 심사내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성

○ 시설물 안전 및 신공법 적용의 가능성 등

□ 시행방법 : 전담팀 구성하여 심사

○ 전담팀 : 20명 내외

구 분	구 성 내 용	역 할
VE책임자 (퍼실리테이터 포함 3명)	▸************* *************** - 진행 및 보고서 작성 보조 2명 (중급기술자)	설계경제성 심사 업무 진행 및 총괄 심사결과 종합 결과보고서 작성 등
VE담당관 (1명)	▸********	회의 진행 및 결과 정리
팀 원 (7명)	▸ 건축분야 외부전문가 2명 - ************ - ************* ▸ 토목분야 외부전문가 2명 - *************** - ************** ▸ 전기분야 외부전문가 1명 - ************* ▸ 내부 검토위원 2명 - *********** - ************	정보 분석, 검토, 아이디어 제안, 발표, 평가, 보고서 작성 등
발주부서 및 설계자 (10명 내외)	▸ 발주담당, 설계업체 설계자	사업설명 등 (설계내용, 현장설명 등)

□ 설계경제성 심사 시행절차 - (신청접수 후 제안서 제출까지 21일 소요)

추진일정		검 토 절 차		업 무 내 용
’16. 3. 3		설계경제성 심사 신청 (발주기관 → 계약심사과)		▸설계경제성 심사 신청서 접수
’16. 3. 7 ~ 3. 11(5일)		설계경제성 심사 계획수립 (총괄 담당)		▸팀 구성 및 회의실 확보 ▸추진일정, 시행방법 등 ▸자료 사전검토(심사위원)
’16. 3. 14 ~ 3. 28(11일)		설계경제성 검토회의 시행 (심사 전담팀)		▸현장 확인 및 1차 검토회의 - 사업설명(설계자) ▸2차, 3차 검토회의 : 대안 구체화 - 아이디어제시, 결과이행 회의 ▸최종 검토회의 : 보완 및 의사결정
’16. 3. 29 ~ 3. 31(3일)		설계경제성 심사 제안서 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸설계경제성 심사 제안서 통보
’16. 4. 1 ~ 4. 20(14일)		제안서 검토 및 반영계획 제출 (발주기관 → 계약심사과)		▸설계경제성 심사제안서 수용 여부 결정 및 통보
’16. 4. 22		심사결과 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸최종 결과보고서 작성 ▸심사결과 통보

□ 설계경제성 심사 검토회의 세부일정

일 시	내 용
’16. 3.14(월) 14:00~18:00	- 사업설명 및 현장답사 ‣ 장소 : 중구 태평로1가 60-6, 정동 3-3 일대
’16. 3.16(수) 10:00~18:00	- 1차 검토회의 : 아이디어 제시, 대안 구체화 ‣ 장소 : 시립미술관 회의실(사무동 1층)
’16. 3.17(목) 10:00~18:00	- 2차 검토회의 : 대안에 대한 가치평가 및 분석 ‣ 장소 : 시립미술관 회의실(사무동 1층)
’16. 3.21(월) 10:00~18:00	- 3차 검토회의 : 대안에 대한 가치평가 및 분석 ‣ 장소 : 시립미술관 회의실(사무동 1층)
’16. 3.28(월) 10:00~18:00	- 최종 검토회의 : 보완 및 의사결정 ‣ 장소 : 시립미술관 회의실(사무동 1층)

※ 100억원 이상 복합공사를 고려하여 검토회의 4회 추진

Ⅳ		소요예산

□ 소요예산 : 15,230천원

○ 외부전문가 수당 : 14,030천원

— 리더(기술사) : 2,969천원( 2,969천원 × 1명)

— 위원(기술사) : 8,535천원(1,707천원 × 5명)

— 퍼실리테이터(중급기술자) : 2,526천원(1,263천원 × 2명)

※「설계경제성심사제도 운영현황 및 개선방안」(계약심사과-10559(’15.6.15))에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 1,200천원

□ 예산과목 : 공공재생과 예산 활용

Ⅴ		향후계획

□ 설계경제성 심사결과 통보  - - -  - - -  ’16. 4. 22

※  발주기관(부서)은 설계경제성 심사 결과 내용이 비용을 현저히 증가 시키는 등 적용하기 곤란한 특별한 사유가 없으면 설계에 반영하여야 하고, 반영이 곤란할 경우 그 사유를 계약심사과로 통보

붙   임 : 설계경제성 심사의뢰 공문 및 신청서 각 1부.  끝.