문서번호	설비부-3287
결재일자	2016.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
지장환		여인웅	03/04 권오식
협조

『서울인생이모작지원센터 50+캠퍼스 리모델링 통신공사』

관급자재(방송장치) 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울인생이모작지원센터50+캠퍼스 리모델링 통신공사』

관급자재(방송장치) 설계변경 검토보고

우리 본부에서 시행하는 「서울인생이모작지원센터50+캠퍼스 리모델링 통신공사」에 필요한 방송장치(관급)중 전동프로젝터 1대를 현장여건에 맞는 규격으로 변경·설치 하고자 함.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서울인생이모작지원센터 50+캠퍼스 리모델링 통신공사

□ 공사위치 : 은평구 통일로 684(서울혁신파크 8동)

□ 공사기간 : 2015.11.01.~2016.03.31.

□ 계약금액 : 96,646,000원

□ 계 약 자 : 삼정정보통신 대표자 이순봉

2		검 토 내 용

□ 계약현황

( 단위:원)

자재명	수량	계약자	계약금액	납품기한	비고
구내방송장치	1	㈜디라직	139,000천원	‘16.03.31

□ 변경사유

○ 4층 가변형 다목적 대강의실에 설치할 방송설비 중 전동프로젝터 1대가 바리솔등(간접조명)설치 구간과 겹처 설치가 불가능하고

○ 건축, 전기도면 검토 결과 전동프로젝트로 설치할 수 있는 공간이 확보되지 않아 천정고정형 프로젝터로 규격을 변경하여 설치하고자 함.

□ 주요 변경내용

( 단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감금액	비고
프로젝터 엘리베이션	2	1	감 1,401,400
프로젝터 브라켓	-	1	증 440,000
전동콘트롤 유닛 4CCT	1	-	감 933,900
전동콘트롤 유닛 3CCT	-	1	증 748,000
합 계			감 1,147,300

□ 변경금액

( 단위:원)

구 분	변경전	변경후	비 고
계약금액	139,000,000	137,852,700	감 1,147,300

3		조 치 의 견

□ 건설총괄부로 관급자재 변경구매 요청하여 공사추진에 만전을 기하고자함.

붙임  1. 관급자재(방송장치)설계변경 도서 1부.

2. 4층 강의실 프로젝터 규격 변경 참고 도면 1부. 끝.