함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	주식회사 건화(올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 감리단)
(경유)
제목	실정보고 승인 통보(올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사)

1. 건올감 2014-23,24,25,26(2014.1.20.)호와 관련입니다.

2. 귀사에서 감리업무 수행중인 『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』와 관련하여 제출된 실정보고에 대하여 아래와 같이 승인 통보 하오니 설계내역서 변경후 계약금액 조정 신청 바랍니다.

- 아                       래 -

1) 쉴드TBM 암별 굴진 연장 정산에 따른 감액 실정보고

- 감리단 검토 의견대로 시행

2) 세그먼트 볼트박스 몰탈 주입 물량 누락 실정보고

- 계약금액 조정시 증가되는 몰탈량 산출을 부상방지대, 관받침대, 몰탈배관 거치대, 공기배관 및 몰탈주입배관 체적을 고려하여 재 산정할 것.

3) 몰탈 채움 확인용 CCTV 설치 실정보고

- CCTV는 적정한 몰탈주입 확인이 필요한 구간까지만 설치할 것.

4) 터널 내부 강관 운반시 전도방지용 몰탈채움비 반영 실정보고

- 감리단 의견대로 시행

첨부 : 실정보고 검토서 각 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	라승보		시설과장	전결 01/28 이임섭
협조자
시행	시설과-621	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-3942	/전송	3146-3989	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	대시민공개