투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	무궁화단지주택재건축정비사업조합장
(경유)
제목	교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사 기간변경 승인 통보 (무궁화단지)

1. 항상 시정 발전에 협조하여 주시는 귀사에 감사드립니다.

2. 도로보수과338(2016.1.12), 무궁화 2016023(2016.3.3)호와 관련, 교통안전시설(노면표시) 원인자 부담공사 기간 연장요청에 대하여 아래와 같이 변경 승인 통보하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 무궁화단지 주택재건축정비사업 원인자부담공사(노면표시)

나. 규제승인 : 서울지방경찰청 교통관리과-35322(2015.12.23)

다. 위    치 : 서대문구 홍제동 무궁화연립 재건축 현장 일대(모래내로)

라. 변경내역

구 분	관 련 업 체			공 사 기 간		원인자	비 고
	설 계	감 리	시 공	당 초	변 경
노면 표시	㈜건영이앤씨	㈜영호이앤씨	오나라건설㈜	2016.01.12 ~ 2016.02.29	2016.01.12 ~ 2016.03.30	무궁화연립 재건축조합

마. 연기사유 : 사업구간내 토목공정 변경 및 지연으로 인한 공기부족.

※ 공사 준공시 T-GIS(2016-0207-003)에 사전 입력되어야 준공이 가능함을 알려드리며, 원인자는 준공요청시 교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항을 참조하여 요청하시기 바랍니다.

붙 임 : 교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	권세봉		도로보수과장	03/04 이규철
협조자	주무관	이상하
시행	도로보수과-1991	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8359	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개