문서번호	건축부-2829
결재일자	2016.3.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
신효섭		곽동호	03/07 안재혁
협 조

「시민생활사박물관 리모델링공사」

설계공모 작품접수 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3

「시민생활사박물관 리모델링공사」

설계공모 작품접수 결과보고

『시민생활사박물관 리모델링공사』 설계용역 설계공모와 관련하여 작품접수 결과를 보고 드림

1. 용역개요

○ 사 업 명 : 시민생활사박물관 리모델링공사

○ 위    치 : 서울시 노원구 622번지(대지면적 : 13,209㎡)

○ 지역지구 : 제3종일반주거지역

○ 사업내용

- 마스터플랜 : 건물 6개동 및 단지에 대한 종합계획

- 리모델링 공사

· 규 모 : 3개동, 지하1층/지상5층, 연면적 6,322㎡

· 용 도 : 문화 및 집회시설(박물관)

○ 사업기간 : 2013.8.~2018.9.(설계 : 2016.4.~2016.12.)

○ 총사업비 : 199억원(공사비 131억원, 설계비 9.4억원, 기타 58.6억원)

2. 추진경위

○ 2015. 8.31. : 가칭 시민생활사박물관(박물관MALL) 조성 건립계획

○ 2015. 8.31. : 설계 및 공사 발주 의뢰

○ 2015.12.24. : 설계공모 공고

○ 2015.12.29. : 현장설명회

○ 2016. 1.20. : 질의회신

3. 작품접수 결과

○ 일    시 : 2016. 3. 7(월)

○ 장    소 : 도시기반시설본부 건축부

○ 접수자격 : 응모신청서를 등록한 자

○ 접수결과 : ㈜제아건축사사무소 등 9개사[붙임참조]

4. 향후계획

○ 2016. 3.17. : 작품심사

○ 2016. 4월 : 설계용역 계약 및 착수

○ 2016.12월 : 설계용역 준공

○ 2017. 1월 : 공사발주

붙 임 : 작품접수 현황 1부.  끝.