문서번호	건축부-2951
결재일자	2016.3.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
지방시설사무관대우		건축총괄과장	건축부장
신현성		박범규	03/09 안재혁
협 조
	건축설비과장			김영수
	주무관			채종철

『세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사』

공사관리 TF 팀 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

『세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사』 공사관리 TF팀 운영계획

『세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 공사』와 관련 공사관리에 대한    TF팀 운영계획을 수립하여 원활한 공사수행에 만전을 기하고자 함

	사 업 개 요

Ⅰ

○ 사 업 명 : 세운상가 활성화를 위한 공공 공간 구성 (1단계)

○ 위    치 : 종로 ~ 세운초록띠 공원 ~ 세운상가 ~청계・대림상가

○ 사업규모 : 43,575㎡ (약13,204평) 공원 3,748㎡ 데크보강 및 신설

○ 사 업 비 : 386억(공사비310억원,설계 12억원, 거점공간 확보 등 기타 64억)

○ 공사기간 : 2016. 3 ~ 2017. 5

○ 공사내용 : 경사광장 및 공원성 3,748㎡, 복합문화공간 설치

데크 보수․보강 8.5~9×860m, 공공플랫폼 설치

데크2열 신설  5.5×430m×2, 보행교설치 : B=8m, L=58m

위 치 도	조 감 도

	주요 내용

Ⅱ

추진현황

○  '15.06.24. : 설계용역 계약

○  '15.12.15. : 사업관리 TF팀 4차 회의

○  '16.01.08~12. : 상가주민 의견 수렴 등

○  '16.01.21. : 계약심의 위원회 심의

○  '16.03.03. : 시공사 낙찰자 결정

향후계획

○ '16.03.15.   : 공사 착수회의

○ '16.10.       : 세운공원 완공

○ '17.05.       : 시운전 및 준공

주변현황

○ 지상 공사에 연접한 상가 영업중으로 공사추진 어려움

○ 공사 진행시 도로 통행에 지장 및 실외기 등 지장물이 존치 등

(상가 현황 사진)

	TF팀 운영방안

Ⅲ

운영계획

○ 운 영 기 간 : `16. 03 ～ `17. 05

○ 회 의

- 주1회 회의 개최 (공사관리 추진이 원활하게 될 때 까지 주1회 지속)

- 필요시 수시 회의 운영

○ 회의 장소 : 본부장실(13층 건축부 회의실 등)

운영내용

○ 공사추진 사항

- 공사추진 현안사항과 조치계획 등

○ 민원등 해결 방안 및 공사 집중관리 통해 민원 리스크 최소화

TF 구성도(별첨)

○ 총 괄 관 리 : 건축부장

○ TF 구성조직 : 3 개반

- 총괄 관리반 : 건축부(총괄과장) 외 3명

- 공사 추진반 : 감리자, 시공자 등

- 환경 관리반 : 설비부서(담당팀장)외 3명

※ 운영방안에 따라 필요시 협의 인원 조정하여 개최토록 함

	행정사항

Ⅳ

○ 2016. 3.          TF팀 구성

○ 2016. 3. 04      1차 TF팀 회의

○ 2016. 3. 16      착수보고회 개최

따로붙임 : 1. TF 구성도

2. 예정 공정표 1부.  끝.