문서번호	도로보수과-1783
결재일자	2016.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
박해웅		김환겸	03/09 임대성
협조
	주무관		송광석

2016년 불량맨홀 정비공사 발주 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(도로보수과)

2016년 불량맨홀 정비공사 발주 계획

우리사업소 관내 시도상 맨홀의 침하·파손, 뚜껑면과 포장면과 단차발생 등의 불량맨홀을 정비함으로서 안전하고 쾌적한 도로환경 조성을 조성하고 차량통행에 불편이 없도록 조치하고자 함.

1		관련근거

○  2016년 노후포장도로 정비 추진계획(도로관리과-2886호, 2016.02.12.)

2		예산현황

○ 불량맨홀 정비공사 : 500,000천원

3		발주계획

○ 사업개요

구 분	불량맨홀 정비개요	계 약 방 법
불량맨홀 정비공사	◦ 불량맨홀정비 461개소 - 주간 229개소 - 야간 232개소	◦ 지명경쟁입찰 - 맨홀보수 신기술 보유업체(6개 업체)

※ 정비노선 현황 : 붙임 ‘위치도’ 참조

○ 세부 발주계획

(단위:천원)

예산구분	계	도급비	관급비	이전비 (폐기물처리비)	비고
시설비	500,000	495,000	0	5,000

○ 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비(401-01)

○ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2016.12.31. 까지

4		계약방법 검토

○ 지명경쟁 입찰(신기술 보유업체 6인)

- 2015 · 2016년 서울특별시 건설신기술 활용심의를 득한 신기술로서 철근콘크리트공사업 또는 시설물유지관리업 등록을 필하고, 입찰공고일 현재(낙찰자는 계약체결일까지) 맨홀보수 신기술 공법 보호기간 내에 있는 아래 업체

※ 신기술 보유업체 현황

연번	공법명	신기술번호	등록일자	신기술 보호기간	업 체 명
1	SMT	건설신기술 제622호	2011.05.16	2011.5.16.~ 2016.5.15.	삼서건설(주)/ 삼서공업(주)
2	TPL-2	환경신기술 제376호	2012.09.03	2012.9.3.~ 2017.9.2.	태평림건설(주)
3	QMR-II	환경신기술 제444호	2014.07.25	2014.7.25.~ 2019.7.24.	㈜우암건설/ ㈜드림이앤지
4	EPM	환경신기술 제452호	2014.11.26	2014.11.26.~ 2019.11.25.	㈜평강산업개발/ 미래피엔씨(주)
5	BTT	환경신기술 제458호	2015.02.16	2015.2.16.~ 2020.2.15.	㈜ 태강디엔씨/ ㈜보은건설
6	DL	환경신기술 제491호	2016.01.08	2016.1.8.~ 2021.1.7.	㈜다현산업

5		추진일정

○ 2016.02.23. : 예산재배정 계획 통보

○ 2016.03.04. : 신기술 활용심의

○ 2016.03.10. : 일상감사 의뢰

○ 2016.03.20. : 공사 발주

○ 2016.04. ~ 12. 31 : 공사시행

붙 임  1. 2016년 불량맨홀 정비공사 내역서 1부.

2. 2016년 불량맨홀 정비공사 위치도 1부.  끝.