문서번호	시설과-1693
결재일자	2016.3.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
박대석	김경수	김한준	03/10 이용태
협 조

『서울둘레길 안내센터 리모델링공사』

준공기한 연기 검토 보고

2016. 3.

중부공원녹지사업소

(시  설  과 )

『서울둘레길 안내센터 리모델링공사』

준공기한 연기 검토 보고

『서울둘레길 안내센터 리모델링공사』시행과 관련하여 “공사내용 변경 및 관급    자재 납품 지연 등”의 사유로 제출된 준공기한 연기요청 건에 대하여 검토하고 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울둘레길 안내센터 리모델링 공사

○ 위    치 : 서울특별시 도봉구 도봉동 4-1

○ 공사기간 :  ‘15.12.16.~ ‘16. 3.14.

○ 공사내용 : 안내센터 82.53㎡ 리모델링, 강사대기실 23.89㎡증축 등

○ 도 급 비 : 442,834,860원

○ 시 공 자 : ㈜쎄데코건설

○ 감 리 자 : ㈜건축사사무소 한맥

□ 현황 및 문제점

○ 영업손실 발생 등을 이유로 제기된 북카페 임차인 민원 해결 차원에서 신설계단 설치를 선행하고 후속적으로 기존 계단을 철거함에 따른 공사기간 증가

○ 북서울 꿈의숲 관리사무소 요구사항인 수유실 배치계획 검토 및 반영에 따른 수유실 공사 착수 지연

북서울꿈의 숲 관리사무소 요구사항(북서울꿈의숲관리사무소-753, 2016. 2. 2.)

·기존 관리실(방재실)에서 공원내 시선차단으로 관리실 기능이 상실되오니 수유실 위치 이전

·북카페 임차인 민원해결차원에서 신설계단 설치후 기존 외부계단 철거

○ 1층 및 2층 전면 데크 공사에 필요한 관급자재(목재판재) 공급 지연

(당초 16.1.22, 변경 16. 2.26)

□ 조치의견

○ 북서울 꿈의숲 관리사무소 요구사항 반영(수유실 위치 변경 등)으로 절대 공기가 부족하여 공기연장되는 사항으로서 시공자 요구사항 같이 준공기한을 연기하여 잔여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

※ 둘레길 안내센터 개소식 행사 일정 : 2016. 4. 1 예정(자연생태과 주관)

○ 준공기한 연기

- 당초 : 2015.12.16 ~ 2016. 3.14.

- 변경 : 2015.12.16 ~ 2016. 3.24.(10일 연장)

- 연기에 따른 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 요청 문서(쎄데코 건설) 1부.

2. 변경 전·후 예정공정표 1부.

3. 북서울 꿈의 숲 관리사무소 요구사항 1부.  끝.