보고서(급수공사연기)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
서장원	김광운	03/10 代김광운
협 조

문서번호 :	급수운영과-5611

성동구 상수도공사 감독업무 수행(금호동4가 1411 급수공사) 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2016. 3. 10

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 서 장 원

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 성동구 상수도공사(장기계속공사)

연번	주 소	수요가명	공사기간	지시번호	비 고
1	금호동4가 1411	강산종합건설	‘16.3.4~‘16.3.13	신설-182

□ 연기요청사항

연번	연기요청 사유	공사연기 기간	요청인
1	건물 외부 비계(동바리) 미철거로 수요가에서 연기 요청	‘16. 4. 4	하종철

□ 검토결과

○ 신축현장 타공정 지연에 따른 수요가측 공사연기로 인하여 공사기간 내 공사가 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	당초 공사기간	변경 공사기간
1	‘16. 3. 4 ~ ‘16. 3. 13	‘16. 3. 4 ~ ‘16. 4. 4

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.