문서번호	도로보수과-2145
결재일자	2016.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
박성록	이석재	03/10 代이석재

'15~16년 제설작업용역(장기계속)

정산 설계변경(전체2회,2차1회)검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.3

북부도로사업소

(도로보수과)

'15~16년 제설작업용역(장기계속)

정산 설계변경(전체2회,2차1회)검토보고

『‘15~’16년 장기계속사업으로 발주한 제설작업 용역이 2016년.03.15.일자로 제설대책기간이 종료됨에 따라 정산(전체2회,2차1회)을 위한 설계변경 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : ‘15~’16년 제설작업 용역(장기계속)

○ 계약금액 : 전체분 310,440,000원(1차분 110,440천원,2차분200,000천원)

○ 계 약 자 : 구산건설중기 대표 김연수

○ 용역기간

- 전체분 : 2015.11.16.~ 2016.03.15

- 1차분 : 2015.11.16.~ 2015.12.31.(기 준공)

- 2차분 :  2016.01.01.~ 2016.03.15

□ 보고내용

○  제설작업용역 준공기한이 3.15일로 설계변경 정산이 불가피한 실정임

○  금년도 구입하여 사업소 본관 뒤편 창고에 보관했던 제설제(350톤)를            제설장비(살포기,삽날 등)보관장소 부족으로 마포구 상암동으로 이전조치

○  전진기지(북악터널)노상에 임시보관하여 사용하여 왔던 제설제를                제설기간이 만료됨에 따라 휀스 안으로 이전 조치 (89톤)

□ 용역기간 : 변경없음

○ 전체분 : 2015.11.16.~ 2016.03.15.(변동없음)

○ 1차분  : 2015.11.16.~ 2015.12.31.(기 준공)

○ 2차분  : 2016.01.01.~ 2016.03.15.(변동없음)

□ 사업비 변경내용

○ 전체분                                                  단위 : 원

공 종	당초	변경	증·감	비고
총용역비	241,702,880	266,805,000	증)25,102,120
도 급 비	241,702,880	266,805,000	증)25,102,120

○ 2차분                                                     단위 : 원

공 종	당초	변경	증·감	비고
총용역비	200,000,000	156,365,000	감)43,635,000
도 급 비	200,000,000	156,365,000	감)43,635,000

○ 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 유지관리,                    제설대책추진, 시설비 및 부대비, 사무관리비(2016년 예산)

□ 검토의견

○ 상기와 같이 정산을 위한 설계변경을 실시하여 “‘15~’16년 제설작업 용역

(장기계속)” 업무에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 설계변경 내역서(전체2회)1부

2. 설계변경 내역서(2차1회)1부

3. 제설용역 근무현황(2차분)  1부   끝.