서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수차집관로 준설공사 공사원가 검토요청 관련 통보

1. 귀 사(센터)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 성원건설 20*******1호(2016.3.3.), 공운건설(주) 2016-03-03호(2016.3.3.)와 관련입니다.

3. 위 호로 요청한 하수차집관로 준설공사 공사원가 검토요청에 대하여 검토결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 작업여건 변화에 따른 작업효율 저하요인(장비 대기,호박돌 등 협잡물 과다,준설토 고형화 등)에 따른 준설공사 시행에 어려움 관련 요청사항은 제출된 일부지역에 일시적인 원가조사 자료(보고서)로, 금년도 공사원가 인상요인으로 적용하기에는 객관성, 합리성 등 곤란

※ 다만, 현장여건에 따라 다년간 축적된 객관적 작업효율 저하요인이 있을시 감독 확인하에 자료 작성 후 요청시 추후 검토 가능

다. 따라서, 각 센터는 금년에는 다가오는 우기 등 준설공사 기한이 촉박하므로 기존 원가산출 기준에 따라 조속 공사발주 후 차집관로 준설 시행. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장),서울특별시난지물재생센터소장(시설보수과장),(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사,성원건설 대표이사 ,공운건설(주) 대표이사
주무관	박만헌		주무관	강청금		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	03/10 이철해
협조자
시행	물재생시설과-3581	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개