과 장					03/10 김안철	심사자	안나현	설계자		김운기	설 계		심 사		결 재
											2016년 3월 10일		2016년 3월 10일
설 계 변 경 내 역 서
	공사명 : 데이터센터 ICT교육장 조성 공사
	구 분					당초			변경			증감		비 고
	공사비		공 급 가 액			99,209,000			101,894,000			2,685,000
			부 가 가 치 세			9,920,900			10,189,400			268,500
			계			109,129,900			112,083,400			2,953,500
설계변경 개요 : 1. 천장 점검구 추가 (9개 → 20개, 건축기획과-1756, 2016. 2. 19) 2. 로비 창호(1/SW) 설치 제외 3. 폐기물 처리비 원가계산식 오류 정정