문서번호	설비부-3661
결재일자	2016.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
유영선		임현근	03/11 권오식
협조

『용두3 빗물펌프장 신설 전기공사』

관급자재 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『용두3 빗물펌프장 신설 전기공사』

관급자재 변경 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인『용두3 빗물펌프장 신설 전기공사』의 관급자재(배전반, 계측제어) 변경사항이 발생되어 검토 보고드림.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 중동빗물펌프장 외 2개소 전기공사(2차수)_용두3 빗물펌프장

○ 공사개요

- 배수펌프 : 펌프일체형수문 45KW×2대, 37KW×2대

- 수전설비 : 380/220V, 200kVA

○ 계 약 자 : ㈜한울전력 (대표:유인철)

○ 도급금액 : 72,454,250원

○ 공사기간 : 2013.05.20. ~ 2016.04.30

Ⅱ		검 토 내 용

○ 변경사유 : 기계부분 관급자재인“펌프일체형 수문 구매설치”계약 건에 펌프기동반 및 자동제어의 기능이 일부 포함 계약되어 있어 전기공사 부분의 관급자재인“배전반 구매설치, 감시제어설비 구매설치”와 중복되어 관급자재 설계변경이 필요함.

Ⅲ		보고자 검토의견

○ 펌프일체형 수문의 기능인 인버터 속도제어에 의한 유입수량에 신속히 대응하여 수해를 방지하고, 유지관리의 편리를 위하여 배전반 및 계측제어설비 관급자재를 변경 계약코자 함.

○ 계약금액 변경내역

구 분	계 약 자	계 약 금 액(원)		증 감
		당 초	변 경
배전반	㈜일산전기 대표 이완해	85,200,000	53,867,000	감)31,543,000
계측제어	주)싸이몬 대표 안재봉	165,000,000	115,500,000	감)49,500,000
펌프일체형 수문	하서산업(주) 대표 김상국	840,000,000	840,000,000	변경없음

끝.