투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 물품계약 납품기한 변경 의뢰

9호선 연장건설(2,3단계)을 위한 정보통신분야 물품구매 계약(5건)에 대해 아래와 같이 납품기한을 변경요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 물품계약 현황 -

(단위 : 원)

연번	계약건명 (계약번호)	계약상대자 (주 소)	계약금액	계약일자	닙품기한
1	서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 물품구매설치 (12132036600)	현대정보기술(주) 마 용 득 (서울시 금천구 가산디지털2로 179-0(가산동, 롯데센터))	14,282,000,000	2013.03.20	2016.04.30
2	서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 자동요금징수설비 제작구매 (12132128600)	주식회사 엘지씨엔에스 김 대 훈 (서울시 여등포구 여의대로 24 FKI타워 33층)	3,690,000,000	2013.06.20
3	서울지하철 9호선 연장(2,3단계) 무정전전원장치 제작설치 (12132099000)	㈜크로마아이티 박 윤 서 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, SK 테크노파크 메가센타107호(상대원동)	1,285,355,580	2013.05.13
4	서울지하철 9호선 연장(2,3단계) 자동방송장치 제작설치 (12132067700)	㈜디라직 박 성 기 (경기도 안양시 동안구 벌말로 118번길 18, 디라직빌딩)	670,672,870	2013.04.15
5	서울지하철 9호선 연장(2,3단계) 배선반 제작설치 (12132046100)	국제텔레시스(주) 박 병 헌 (서울시 마포구 토정로 13-1)	181,819,000	2013.03.27

가. 납품기한 변경

- 당초 : 2016. 04. 30

- 변경 : 2018. 12. 31

나. 계약금액 : 변경없음

다. 변경사유 : 선행공정 지연에 따른 납품 시기 미도래

라. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

덧붙임 : 1. 계약건별 합의서 각 1부

2. 납품기한 연기 방침서 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	박규영		정보통신과장	추경수		도시철도설비부장	03/11 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-2645	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울시 중구 청계천로 8 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7323	/전송	772-7308	/		/	대시민공개