서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년도 산사태 예방사업 후보지(민원발생지역, 사업필요지역) 제출

1. 2017년도 산사태 예방사업을 우기전까지 정비하기 위하여 아래와 같이 추진할 예정입니다.

2. 각 사업소, 자치구에서는 2017년도 산사태 예방사업 후보지(민원발생지역 및 사업 필요지역)를 ’16.4.15(금)까지 제출(붙임 제출양식 4, 5 작성)하여 주시기 바라며, 향후 추진일정을 알려드리오니 업무에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 2017년 산사태 예방사업 후보지 제출대상

1) 제출대상 : 자치구, 사업소에 접수된 민원발생지역 및 해빙기 안전점검 등 순찰시 산사태 예방사업이 필요하다고 판단되는 지역

※ 제출제외 : (붙임1) 서울시 사면전수조사 용역 결과 2017년 사업후보지와 중복된 지역

(붙임3) 16년 사업대상지 조사결과 17년 사업대상지 확정지역(관악구 16개소)

나. 향후 추진일정

1) ’16.5월~6월 : 현장조사

- 조사대상 : 자치구, 사업소에 제출한 민원발생지역 및 사업 필요지역

※ 현장조사 미실시 : (붙임1) 서울연구원 사면전수조사 결과 17년 사업 후보지(405개소)

(붙임3) 17년 사업대상지 확정지역(관악구 16개소)

- 조사방법 : 전문가, 서울시, 자치구, 사업소, 시민(민원) 합동조사

2) ’16.7월~8월 : 추정사업비 등 조사결과 보고서(안)에 대해 사업소, 자치구 의견수렴 후 사업대상지 확정

3) ’16.8월 : 2017년 산사태 예방사업 추진계획수립 통보(서울시→자치구 등)

4) ’16.8월~12월 : 산사태 취약지역 지정고시

사방사업 타당성평가(서울시), 실시설계, 설계심의

5) ’17.1월~2월 : 공사발주 및 계약

6) ’17.3월~6월 : 공사시행 및 준공(우기전)

붙임 1. 서울시 사면전수조사 용역 결과 2017년 사업후보지(405개소) 1부.

2. 서울시 사면전수조사 용역 결과 2017년 사업후보지 위치도 및 현황사진

샘플 1부.(용량초과로 담당자 행정메일 발송)

3. 2017년 사업대상지 확정지역(관악구 16개소) 1부.

4. 자치구, 사업소 민원발생지역 및 사업 필요지역 목록(제출양식 4) 1부.

5. 자치구, 사업소 민원발생지역 및 사업 필요지역 위치도 및 현황사진

(제출양식 5) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(공원녹지과장),서울특별시중구청장(공원녹지과장),용산구청장(공원녹지과장),성동구청장(공원녹지과장),광진구청장(공원녹지과장),동대문구청장(공원녹지과장),중랑구청장(공원녹지과장),성북구청장(공원녹지과장),강북구청장(푸른도시과장),도봉구청장(공원녹지과장),노원구청장(공원녹지과장),은평구청장(공원녹지과장),서대문구청장(푸른도시과장),마포구청장(공원녹지과장),양천구청장(공원녹지과장),강서구청장(공원녹지과장),구로구청장(공원녹지과장),금천구청장(공원녹지과장),동작구청장(공원녹지과장),관악구청장(공원녹지과장),서초구청장(공원녹지과장),강남구청장(공원녹지과장),송파구청장(공원녹지과장),강동구청장(푸른도시과장),동부공원녹지사업소장(공원운영과장),중부공원녹지사업소장(녹지관리과장),서부공원녹지사업소장(시설과장),서울대공원장(조경과장)
주무관	김계영		사면정비팀장	정상모		산지방재과장	03/14 박기범
협조자	사면관리팀장	신현호
시행	산지방재과-2599	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩 8층	/
전화	2133-2186	/전송	2133-1084	/	kkyoung68@seoul.go.kr	/	대시민공개